문서번호	주차계획과-3410
결재일자	2016.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		김종상	03/14 윤보영
협조

창신동 주택가 공동주차장 건설 (종로구) 예산교부 검토

2016. 3.

도시교통본부

(주차계획과)

창신동 주택가 공동주차장 건설 예산교부 검토

종로구에서 추진중인『창신동 주택가 공동주차장 건설사업』관련 ‘16년 예산편성된 주차장 사업비(시비) 교부 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 종로구 창신길83(창신동 641 외 2)

○ 규    모 : 대지면적 2,071㎡ (연면적 8,307㎡)

- 공영주차장 : 지하4층~지상1층, 주차면수 205면

․일반승용차 165면, 이륜자동차 40면 (연면적: 6,807㎡)

- 청소년문화의집 및 도서관 : 지상2층~지상3층 (연면적: 1,500㎡)

○ 총사업비 : 24,014백만원

구 분	계	사업비		재원구분
		토지매입	건설비	국비	시비	구비
계	24,014	7,000	17,014	1,758	9,040.5	13,215.5
주차장	18,622	7,000	11,622		7,969.5	10,652.5
도서관	1,394		1,394	558	272	564
청소년문화의집	3,998		3,998	1,200	799	1,999

○ 사업기간 : ‘14.2 ~ ‘18.6.

Ⅱ. 추진현황 및 향후계획

○ ‘13.1.16 : 창신동 신년 인사회 주민건의

○ ‘14.2. 3 : 시 투자심사

○ ‘14.7.14 : 중앙 투자심사

○ ‘15.3 ~’16.5 : 보상시행

○ ‘16.2 : 설계현상 공모 및 용역시행

○ ‘16.7  : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ ‘16.8~’18.6 : 공사 시행

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 창신길83 공영주차장 건설 예산 교부

- 관련공문 : ‘16년 주차장건설사업 시비보조금 배정요청

: 종로구 주차관리과-3740호 (‘16.2.17)

□ 주차장 분야별 사업비 (단위: 백만원)

구 분		사업비	시 비	구 비	발주시기	비고
계		18,622	7,969.5	10,652.5
보상비	보 상	9,700	3,500	6,200	‘15.6~
설계용역	설계용역	346	173	173	‘16.3~
공사발주	토목,건축	7,250	3,633.5	3,616.5	‘16.10~
	전 기	225	112.5	112.5
	소방전기	375	187.5	187.5
	통 신	196	98	98
	기계	166	83	83
감리비	시공감리	364	182	182	‘16.10

□ 예산배정 검토(주차장건설)

○ 사업비 배정 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	~‘15	‘16년			‘17~	비고
			계	기배정	금회배정
계	18,622.0	7,650	5,152	-	5,152	5,820.0
시 비	7,969.5	4,150	1,000	-	1,000	2,819.5
구 비	10,652.5	3,500	4,152	-	4,152	3,000.5

□ 요청 사유

○ 기본 및 실시설계용역 및 공사발주 소요비용 시비배정 요청

□ 검토 의견

○ 동 사업은 현재 토지보상 및 설계 현상공모중이며 추진일정에 따라 사업은 정상적으로 추진중인 것으로 판단됨

○ 기본 및 실시설계용역 및 공사발주 등에 필요한 ‘16년 편성된 시비 1,000백만원 요청하는 사항으로 사업이 원활하게 이루어질 수 있도록 예산배정함이 타당하다고 사료됨.

첨부   1) 예산교부 요청공문 1부

2) ‘16구비편성 및 토지현황 1부.   끝.