문서번호	시설과-1125
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
이재미	오삼록	나병우		03/11 강홍빈
협 조
	학예연구부장		박현욱

새봄맞이 박물관 환경정비 계획

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

새봄맞이 박물관 환경정비 계획

관람객이 증가하는 봄 시즌을 맞이하여 박물관과 경희궁, 경교장, 백인제가옥의 내․외부 환경정비를 통하여 보다 더 깨끗하고 쾌적하며 안전한 환경으로 시민 고객을 맞이하고자 함.

1		추 진 근 거

□ 관장 요청사항  <3월 월간 회의시, 2016.3.8.(화)>

“봄맞이 환경정비를 범박물관 차원으로 종합계획을 수립하여 실시토록 하기 바람”

- 관람성수기 대비 시설안전점검, 고객서비스, 전시환경 정비 등 박물관 전 분야를 대상으로 추진

2		추 진 방 향

□ 박물관 내․외부 대청소로 깨끗한 박물관 조성

□ 벗겨지고 낡은 시설 교체 및 봄꽃 식재로 쾌적한 박물관 조성

□ 위험시설 정비 및 비상대피로 확보 등 안전한 박물관 조성

3		추 진 계 획

□ 기    간: 2016. 3. 1. ~ 4. 30.

□ 대 상 지: 서울역사박물관, 경희궁, 백인제가옥, 경교장

□ 내    용: 4개분야 21개 사업 추진

작 성 자	경영지원부장: 나병우 ☎ 724-0105 시설과장 : 오삼록 ☎ 0130 담당 : 이재미 ☎ 0122

□ 방    법: 자체 시행 및 전문업체 도급 시행

4		세부 추진계획

▣ 청소분야: 6개 사업

□ 박물관,경교장,백인제가옥 사무공간 대청소	(일시:′16.3.28.(월) 17시)
○ 대 상 지: 총무과 등 전부서 (뮤지엄센터, 전산실, 연구원사무실 등 부속실 포함) ○ 내 용: 사무실내 먼지제거, 책상정리, 불필요한 물품 정리 및 처분 ○ 방 법: 전 직원 참여 자체시행 ○ 소요예산: 비예산

□ 박물관 교육실 대청소	(기간:′16.3.14.~3.25.)
○ 대 상 지: 어린이학습실, 1,2학습실 ○ 내 용: 대청소, 교구안전점검, 환경정비 ○ 방 법: 교육대외협력과 자체시행 ○ 소요예산: 비예산

□ 박물관, 경교장 외벽 물청소	(일시:′16.3.20.~4.10.)
○ 대 상 지: 박물관, 경교장 ○ 내 용: 외벽유리 및 H빔 찌든때 제거 ○ 방 법: 전문업체 도급시행 ○ 소요예산: 4백만원

□ 경희궁 내부 및 주변 정비	(일시:′16.3.20.~4.10.)
○ 대 상 지: 경희궁 내부 및 경비초소 ○ 내 용: 사진전시물 먼지제거 및 청소 ○ 방 법: 자체시행 ○ 소요예산: 비예산

□ 전기, 기계 시설물 세척	(일시:′16.3.15.~4.30.)
○ 대 상: 박물관, 경교장, 백인제가옥 ○ 내 용: 시설물 먼지, 부착물 청소 - 가로등 113등, 경관조명 237등 - 옥외형 CCTV카메라하우징 42개 - 실외기 47대, 휀코일 135개, 소화기 260개 - 가로등 배너 게시대 청소 ○ 방 법: 시설관리공무직 자체시행 ○ 소요예산: 비예산

□ 박물관 수경시설 가동전 청소	(일시:′16.4.15.~4.30.)
○ 대 상: 바닥분수,거울연못,실개천 ○ 내 용: 수전 및 표면 청소 ○ 방 법: 자체시행 ○ 소요예산: 비예산

▣ 관람환경 개선 분야: 10개 사업

□ 복도 전시 사진 교체	(일시:′16.3.25.)
○ 대 상: 1,2층 복도 사진액자 46점 ○ 내 용: 보유사진 활용 교체 ○ 방 법: 자체시행 ○ 소요예산: 비예산

□ 박물관 광장 야외전시장 확충	(기간:′16.4.15.~4.30.)
○ 대 상 지: 박물관 광장 ○ 내 용 - 소의교․복천교 교명주 설치 - 지장수목(철쭉) 이식 ○ 방 법: 전문업체 도급 시행 ○ 소요예산: 3백만원

□ 박물관 어정뜰 기존 데크 보수․보강	(기간:′16.3.1.~3.18.)
○ 대 상 지: 어정뜰 중정데크(1학습실 앞) ○ 내 용: 목재데크 및 창고 설치 - 모르타르, 인조잔디 철거후 목재데크 설치 - 데크 하부 조립식판넬 창고(52㎡) 설치 ○ 방 법: 전문업체 도급시행 ○ 소요예산: 22백만원

□ 박물관 내부공간 조정 및 재배치	(기간:′16.3.15.~7.31.)
○ 대 상 지: 사무공간 전체 ○ 내 용 - 효율적인 사무공간 조성을 위한 공간 재배치 - 도서 등 수납공간 설치 ○ 방 법: 시설과 별도계획 수립후 시행 ○ 소요예산: 200백만원

□ 야외 봄꽃식재 및 실내화분 정비		(기간:′16.3.7.~4.30.)
○ 대 상: 박물관, 백인제가옥, 경교장 ○ 내 용 - 박물관, 백인제가옥 봄 꽃묘 2,820본 식재 - 박물관 카페 및 경교장(모형전시) 실내화분 정비 ○ 방 법: 자체시행 ○ 소요예산: 2백만원

□ 박물관 녹지대 정비		(기간:′16.3.7.~4.15.)
○ 대 상: 박물관 녹지대 ○ 내 용 - 녹지대 수목 보식(직원과 함께 식목행사 실시) - 수목표찰, 잔디보호 로프휀스 정비 ○ 방 법: 자체시행 ○ 소요예산: 3백만원

□ 경희궁 태녕전 서측문 보수	(기간:′16.3.15.~3.31.)
○ 대 상: 경희궁 태녕전 서측문 ○ 내 용: 목재 정비 - 내부문과 담장사이 벌어진 목재 정비 - 외부문 좌측 기둥 갈라진 목재 정비 ○ 방 법: 자체시행 및 하자보수 ○ 소요예산: 비예산

□ 백인제가옥 담장 기와 및 기단 줄눈 보수		(기간:′16.3.15.~3.31.)
○ 대 상: 관리동 담장3개소, 별당채 기단 줄눈 1개소 ○ 내 용 - 담장기와 탈락 회바름 정비 - 기단 회바름 탈락 줄눈 정비 ○ 방 법: 자체시행 및 하자보수 ○ 소요예산: 비예산
	▲ 기단 회바름 탈락

□ 백인제가옥 조경수목 및 마사토 포장 정비		(기간:′16.3.7.~4.30.)
○ 대 상: 사랑채 및 대문간채 ○ 내 용 - 사랑채 큰나무(향나무, 주목) 가지치기 - 대문간채 유실된 마사토 약 50㎡ 보충 ○ 방 법: 자체시행 및 전문업체 도급시행 ○ 소요예산: 3백만원
	▲ 가지치기 대상 수목

□ 박물관 주차정산소 정비		(기간:′16.3.7.~4.30.)
○ 대 상: 박물관 부설주차장 ○ 내 용 - 노후 주차정산소 1동 교체 - 훼손되고 지워진 주차선 재도색 ○ 방 법: 전문업체 도급시행 ○ 소요예산: 20백만원

▣ 편의시설 분야: 2개 사업

□ 박물관 대여 휠체어, 유모차 교체		(기간:′16.4.1.~4.30.)
○ 대 상: 박물관 1층 로비 ○ 내 용: 휠체어 7대, 유모차 7대 노후여부 점검 및 신규물품 구입 ○ 방 법: 자체시행 ○ 소요예산: 4백만원

□ 박물관 파라솔 테이블․의자 재설치		(기간:′16.3.7.~4.30.)
○ 대 상: 박물관 광장, 어정뜰 ○ 내 용: 파라솔 테이블 의자 16set 설치 - 보유 파라솔 재활용, 파라솔4개, 받침2개 구매 ○ 방 법: 자체시행 ○ 소요예산: 1백만원

▣ 안전관리 분야: 3개 사업

□ 박물관 야주개홀 대피로 적치물 정리		(기간:′16.3.8.~3.31.)
○ 대 상: 박물관 야주개홀 옆 대피로 ○ 내 용 - 보관 필요물품 별도 공간으로 이동 - 불용물품을 소요조회후 불용처리 ○ 방 법: 총무과 별도계획수립후 자체시행 ○ 소요예산: 비예산

□ 박물관 서측 외부 계단 정비		(기간:′16.4.1.~4.15.)
○ 대 상 지: 박물관 서측 외부 계단 ○ 내 용: 처지고 밀려나온 돌계단 정비 ○ 방 법: 전문업체 도급시행 ○ 소요예산: 3백만원

□ 박물관 광장 바닥포장 정비		(기간:′16.4.1.~4.15.)
○ 대 상 지: 박물관 광장(전차 옆) ○ 내 용: 점토포장 침하부분 정비 ○ 방 법: 전문업체 도급시행 소요예산: 2백만원

5		추 진 일 정

분야	사 업 명	추 진 일 정												추진 부서
		3월						4월
		10일		20일		31일		10일		20일		30일
청소	박물관, 경교장, 백인제가옥 사무공간 대청소													전 부서
	박물관 교육실 대청소													교육대외협력과
	박물관, 경교장 외벽 물청소													시 설 과
	경희궁 내부 및 주변 청소													시 설 과
	전기, 기계 시설물 청소													시 설 과
	박물관 수경시설 가동전 청소													시 설 과
관람 환경 개선	박물관 복도 전시 사진 교체													전 시 과
	박물관 광장 야외전시물 확충													보존과학과 시 설 과
	박물관 어정뜰 기존 데크 보수․보강													시 설 과
	박물관 내부공간 조정 및 재배치													시 설 과
	야외 봄꽃식재 및 실내화분 정비													시 설 과
	박물관 녹지대 정비													시 설 과
	경희궁 태녕전 서측문 보수													시 설 과
	백인제가옥 담장기와 및 기단 줄눈 보수													시 설 과
	백인제가옥 조경수목 및 마사토 포장 정비													시 설 과
	박물관 주차정산소 정비													시 설 과
편의 시설	박물관 대여 휠체어, 유모차 교체													총 무 과
	박물관 파라솔 테이블․의자 재설치													시 설 과
안전 관리	박물관 야주개홀 대피로 적치물 정리													총 무 과
	박물관 서측 외부 계단 정비													시 설 과
	박물관 바닥포장 정비													시 설 과

6		소 요 예 산

□ 소요예산: 267백만원

□ 예산과목: 2016년도 박물관 세출예산

7		행 정 사 항

□ 사무공간 대청소 참여 : 전 직원

□ 새봄맞이 환경정비 결과 제출(′16.5.2.한) : 해당부서

붙임: 결과제출보고서(양식) 1부. 끝.

책임운영기관 성과지표  13.관람환경의 적정성

14.고객만족도