문서번호	도시철도토목부-3021
결재일자	2016.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		김성호	03/14 김진팔
협 조
	주무관			김용선

『지하철9호선 3단계 923공구 폐기물처리용역』

계약기간 및 계약금액 조정 검토 보고(총괄3회)

2016. 03

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철9호선 3단계 923공구 폐기물처리용역』

계약기간 및 계약금액 조정 검토보고(총괄3회)

『지하철9호선 3단계 건설공사 폐기물 처리용역』과 관련 계약기간 및 계약금액 조정에 대해 검토 보고 드림. ※ ㈜동명기술공단 동기공 제2016-0680호(‘16.03.03)

1		용역 개요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사 폐기물처리용역

○ 용역금액 : 금513,000천원

○ 용역기간 : ‘10.08.05 ~ ‘16.03.21

○ 계 약 자 : 고려개발(주)

○ 폐기물 준공 및 발주현황

(단위 : 천원)

구분	총괄	준공(1~5차)	6차	장래	비고
용역기간	‘10.08.05 ~’16.03.21	‘10.11.10 ~15.12.31	발주예정	-
용역비	513,000	416,800	70,000	26,200

2		관련 근거

○ 지하철9호선 3단계 건설사업 공사기간 조정 검토 보고

(본부장 방침, 도시철도토목부-16559호(‘15.12.28))

○ 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행규칙 제8조(건설폐기물의 적절한 처리비용의 반영)

- 법 제15조 제2항의 규정에 의하여 발주자가 건설폐기물의 처리용역을 발주하는 때에는 건설폐기물의 배출량을 기준으로 적정처리비를 반영하여야 하며, 당초 발주한 건설폐기물외에 추가로 발생하는 건설폐기물에 대하여도 배출량을 기준으로 적정 처리비를 반영하여야 한다.

3		추진 경위

○ ‘15.11.18 : 938변전소 수전선로 공사시 발생된 폐기물 처리협조 요청

(도철설비부 → 도철토목부)

○ ‘15.11.20 : 938변전소 수전선로 공사시 발생된 폐기물 처리지시

(도철토목부 → 감리단)

○ ‘15.12.28 : 9호선 3단계 건설사업 공사기간 조정 검토보고(본부장 방침)

○ ‘16.03.02 : 폐기물 설계변경(총괄3회) 요청(감리단 → 도철토목부)

4		보고 내용

○ 폐기물량 변경사유

- 지하철 9호선 3단계 938변전소 수전선로 공사시 발생된 건설폐기물에 대하여 기 계약되어 진행중인 923공구 건설공사 폐기물 처리용역업체로 하여금 위탁처리 방침에 의거 반영

(도시철도설비부-11431호, ‘15.11.11)

- 폐기물 처리 현황

・발생위치 : 938변전소(923공구) 수전선로 공사현장(동남로)

・처리기간 : ‘15.11.23 ~ ‘15.11.28

・처리수량 : 195.370톤(84.943㎥)

・반영예산 : 3백만원(상차비는 송변전공사에서 부담)

- 폐기물 증가물량 내역

공 종	당 초		변 경		증 감		비고
	수 량 (ton)	금 액(원)	수 량 (ton)	금 액(원)	수 량 (ton)	금 액(원)
폐콘크리트	7,230	115,094,370	7,230	115,094,370	-	0
폐아스콘	24,790	351,869,260	24,985	354,634,090	195	2,764,830
계	-	466,963,630	-	469,728,460	-	2,764,830
부가가치세	-	46,696,363	-	46,972,846	-	276,483
총용역 합계금액	-	513,659,993	-	516,701,306	-	3,041,313
적용		513,000,000		516,000,000	-	3,000,000

○ 용역기간 변경사유

-『9호선 3단계 건설사업 공사기간 조정』에 의거 용역기간 연장 필요

(도시철도토목부-16559호(본부장 방침), ‘15.12.28)

- 용역기간

・당 초 : ‘10.08.05 ~ ‘16.03.21

・변 경 : ‘10.08.05 ~ ‘16.12.31

5		책임감리원 검토의견

○ 938변전소 수전선로 공사시 발생된 건설폐기물 반영한 폐기물처리 용역 변경내역 및 9호선 3단계 건설사업 공사기간 조정에 따른 폐기물 용역기간 연장 반영함에 대해 적정함.

6		조치 계획

○ 책임감리원 검토의견과 같이 938변전소 수전선로 공사로 발생된 폐기물 및 9호선 3단계 건설사업 공사기간 조정에 따른 용역기간 연장에 대해 아래와 같이 처리코자 함.

※ 수전선로 공사로 발생된 폐기물 처리비(증300만원)은 시스템 공사비로 사용

구분		당초	변경	증감
총괄	계약금액	513,000,000	516,000,000	증)3,000,000
	공사기간	‘10.08.05 ~‘16.03.21	‘10.08.05 ~‘16.12.31	증)285일

붙 임 : 1. 책임감리원 검토의견 1부.

2. 설계내역서(총괄3회) 1부.  끝.