문서번호	기전과-2773
결재일자	2016.3.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

	시 민
★주무관	기전과장
박태준	03/11 남궁영주

교통안전시설 원인자부담공사 변경승인 검토 보고 (장지교삼거리 입체화시설공사 관련 교통안전시설 설치공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

서울특별시동부도로사업소

(기전과)

교통안전시설 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「장지교삼거리 입체화시설공사 관련 교통안전시설 설치공사」에 따른 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

공사개요

○ 공 사 명 : 「장지교삼거리 입체화시설공사 관련 교통안전시설 설치공사」 원인자부담공사

○ 공사위치 : 송파구 장지교삼거리 종점부(송파IC 북측)

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2016.08.31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	설 계	감 리	시 공	원인자
신호	도로교통공단	대영유비텍	㈜창희이엔에스	서울특별시SH공사 (기반시설사업부)
안전표지		도로교통공단

검토내용

○ 규제심의 : 서울특별시지방경찰청 교통관리과-2529(2016.1.29.)

- (총3단계) 복공판 철거와 포장 복구공사에 따른 차로재구획, 횡단보도․신호기         (차/보)․안전표지 위치조정 및 기타 노면표시 신설․제거 등

※ 공사안내표지 설치 및 신호수(모범운전자) 배치

○ 변경사항 : 종점부 단계별(3단계) 되메우기 공사에 따른 추가공사 발생으로 인한 준공일 연기요청

- 내 용

구 분	당초 준공일	연기 요청일	연기 사유	비 고
장지교삼거리 종점부 (신호, 안전표지공사)	~2016.03.31.	~2016.08.31.	※ 종점부 단계별(3단계) 되메우기 공사에 따른 1. 차로재구획, 횡단보도, 신호기(차/보), 안전 표지 위치조정 2. 기타 노면표시 신설․제거 등

○ 승인 조건

	승인 조건 내용
- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음 - 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여여 하며, 변경사항(교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함 - 구조계산서에 따른 지주 및 부착대를 설치(구조계산서 제출)하여야 하며, 지주 등에 시설물 추가 설치 시에는 구조계산을 다시하여 제출하여야 함 - 지주(H-BEAM, AL압출마감) 외 적용기준에 대하여는 「서울특별시 교통신호지주 제작설치 적용기준」에 따라 제작설치 - 교통신호제어기 신설시 통신(전송)선을 설치하여야 하며, 인근 제어기(200m이내)와 연동여부 협의(서울특별시지방경찰청 신호운영실) 후 설치 - 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등,가로등) 설치 및 지주내 가로등 안정기실과 신호 점검구는 별도 분리 설치 - 교통신호제어기는 2010년형 개발자검사(호환성 검사포함) 완료한 제품 설치 및 개선된 잠금 장치(자동닫힘) 설치 - 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치 - 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형)신설 - 교통신호제어기 인입전선, 통신(전송)선 및 신호케이블은 지중화 시공하여야 하며, 신호선 포설시 접속부위 없이(선로접속 불가) 포설하여야 함 - 교통신호기공사 업무처리 가이드라인 및 원인자 준수사항 이행 철저 - 교통신호기 주요자재(제어기,교통신호등 등)는 제작일로부터 3개월 이내의 자재 사용 - 공사시행중 공사안내표지 및 신호수(모범운전자) 배치 등 안전준수사항 이행 철저 - DB 신청 및 변경시, DB 수령 및 입력 후 DB인수인계증』,「교통신호운영 정상 확인서」및 「온라인 리포트」제출 - 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견

서울특별시SH공사에서 시행하는 「장지교삼거리 입체화시설공사 관련 교통안전시설 설치공사 원인자부담공사」의 준공일 변경승인 요청에 대하여 현장확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리하고자 합니다.

붙 임 : 1. 교통안전시설물 개선 통보(하달) 공문 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 원인자부담공사 준수사항 및 교통신호기공사 업무처리 가이드라인 각 1부.  끝.