서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	잠원2 빗물펌프장 신설공사에 따른 올림픽대로 지하횡단 협의 회신

1. 도시기반시설본부 방재시설부-3405(2016.03.11.)호 관련입니다.

2. 귀 부에서 추진하고 있는 「잠원2 빗물펌프장 신설공사」의 올림픽대로 비개착횡단추진 공정과 관련하여 다음과 같이 검토의견을 회신하오니 업무에 참고하여 공사를 추진하시기 바랍니다.

3. 아울러, 시설관리공단에서는 침하계측값 등 계측자료를 제출받아 도로의 이상여부를 검토·확인하고 현장점검시 차량의 주행성 등을 상시 확인하여 사고가 발생되지 않도록 공사현장 점검 등 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

가. 기 수립한 시공관리계획 준수하고 추가적인 침하가 발생하지 않도록 공사시공계획상 강관추진 속도(4.5m/day)를 준수하여야 함.

나. 침하관리를 위하여 시행하는 배토량 확인, 계측값, 지하수위, 공사추진 현황 등 관련자료로 추가 침하여부를 상시 점검하고 시설관리공단에 제출하여야 함.(일일 추진 거리 포함)

다. 작업 전 일일추진 공정에 대하여 시설관리공단에 통보하고 올림픽대로상 그라우팅 작업 등 도로에 변형이 발생할 수 있는 공정을 추진할 경우 시설관리공단과 협의하여 추진

라. 추진 중 추가 침하 등 이상징후 발생시 즉시 공사를 중지하고 시설관리공단 등 관련기관에 통보하여 추가사고를 방지토록 조치할 것.

마. 해당 올림픽대로 구간은 이미 2~16mm의 침하현상이 발생되어 계측관리계획상 보수기준(13mm)을 초과하였으므로 시설관리공단과 협의하여 조속한 시일내 재포장할것.

바. 향후 호우로 인한 지하수위 상승 및 저하에 따른 도로침하시 지반보강을 위하여 실시한 그라우팅으로 인하여 도로하부의 토사유실시 취성파괴 거동이 발생할 수 있으므로 지중침하계에 대하여 전문가 의견을 수렴하여 설치할 것.

사. 공사 준공 후 준공도를 도로관리시스템에 등재하여야 함.

아. 공사로 인하여 발생하는 사고의 피해 및 민원은 시행자가 부담처리하고 도로이용에 불편사항이 발생하지 않도록 공사 관리에 철저를 기할 것.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시시설관리공단이사장(도로관리처)
주무관	박용화		전용도로팀장	이앙식		도로시설과장	03/16 송상영
협조자
시행	도로시설과-3074	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1664	/전송	02-2133-1078	/	yonghwa08@seoul.go.kr	/	대시민공개