문서번호	시설과-1670
결재일자	2016.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		시설과장	관리부장
서동민		代이춘한	03/16 심상원
협조	전략기획실장		윤대진
	주무관		이상국

서울대공원 옹벽시설물 자체 정밀점검 추진계획

2016. 3

(시설과)

서울대공원 옹벽시설물 자체 정밀점검 추진계획

우리공원내 옹벽시설물의 자체 정밀점검 계획을 수립시행하여 안전성 확보와 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

◦ 2016년 서울대공원 시설물 안전관리 추진계획(시설과-569,‘16. 3. 14)

◦ 기술용역 발주기관 자체 시행기준(행정2부시장 방침 제10058호,‘11. 7. 8)

< 기술용역 발주기관 자체시행 대상기준 >

□ 시설물 유지관리 분야 중 기타 손상부의 위험요소가 경미하여 용역에 의한 정밀점검이 필요치  않다고 판단되는 시설물의 정밀점검 (자체 점검의 기술적 보완 필요 시 외부전문가 합동 시행)

□ 기술용역 타당성 심사 결과(‘09년) 2종시설물 및 법정외 시설물 중 B등급 이상 시설물의 안전점검(정밀점검)은 외부전문가를 활용하여 자체 시행

□ 점검시설물 현황

◦ 점검대상 : 13개소 (붙임1)

시설종류	종 별	개소	시설명	비 고
옹벽	법정외	13	종합안내소 외 12	최초시행

◦ 토목시설물 자체 정밀점검 시기 : 안전등급 B･C 등급 2년에 1회 이상

- ｢시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 ｣ 제6조 제1항의 안전점검 실시 시기 준용

□ 자체 정밀점검 추진계획

◦ 추진기간 :‘16. 3. 21 ~ ‘16. 6. 30

◦ 점검방법

- 시설물 담당자와 외부전문가 합동점검반 편성 점검

- 시설물 유지관리상 중요한 부분 한정, 육안검사와 측정기구 활용 점검

◦ 점검조 편성

- 점검 책임자 : 책임기술자 (특급기술자)

※ 책임기술자는 ｢시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의거 시행한 정밀점검용역(진단) 경험이 있는 기술자

- 점검조 편성 : 3인

점검시설	외부전문가		담당 공무원
	특급기술자	중급기술자
옹벽	*** ***********	*** ************	시설7급 서동민

◦ 외부전문가 선정기준(사유)

- 전문성 확보를 위해 자격등급 및 경력, 교육이수(정밀안전진단과정-교량및터널) 등 조건을 갖춘 자를 선정

- 안전점검 경험이 풍부한 인력으로서, 특히 안전점검 경험이 많아 시설물의 특성 및 상태, 노후도 등에 대한 지식이 풍부한 자를 우선 고려

◦ 점검 및 주요사항

- 자료수집 및 분석, 현장조사 및 시험

- 외관조사 및 구조적 결함사항 체크

- 상태평가 및 보고서 작성

□ 점검비용 산정

◦ 외부전문가 점검비 산출내역

(단위 : 원)

구분	기술등급	성명	인건비			인쇄비		계
			일수	단가	금액	부수	금액
특급		***	42	261,026	10,963,092	3	300,000	11,263,092
중급		***	42	186,414	7,829,388	-	-	7,829,388
합계					18,792,480		300,000	19,092,480

※ 2016년도 엔지니어링 기술자 노임단가 (건설 및 기타부문) 적용

- 외부전문가 점검수당은 점검 완료보고 후 개인별 은행계좌로 지급

- 점검비 지급 시 원천징수(소득세 : 20%, 주민세 : 소득세의 10%)

◦ 예산현황

- 예 산 액 : 20,000천원

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원 안전시설 보수 및 정비,   시설비

□ 추진일정

◦ 2016. 3.20   : 전차 용역보고서 등 자료제공 (시설물 담당자)

◦ 2016. 3.21   : 자체점검 수행 (외부전문가 및 시설물 담당자)

◦ 2016. 6.30   : 점검결과 보고 (외관조사결과, 보수방안 등)

□ 행정사항

◦ 담당직원과 책임기술자간 자체 정밀점검 일정 협의 추진

◦ 보고서외 확인사항은 담당직원이 책임기술자에게 요청하여 서면 확인 (자격등급 및 경력, 안전점검 및 진단 교육 이수확인 등)

◦ 용역추진중 발생하는 추가과업(고소차, 점검사다리차 사용 및 추가 시험 등)은 사전 보고하여 승인을 득한 후 시행

◦ 외부전문가 점검수당은 자체 정밀점검 완료 보고서 제출 후 일괄지급

붙임 : 점검시설, 과업범위 및 점검비 산출내역 1부.  끝.