문서번호	소방행정과-3342
결재일자	2016.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
김유성	양승회	권오선	03/16 김형철

노후시설 개선 등 직원 처우개선을 위한 -

중부소방서 식당 환경개선공사 기본 계획

중부소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

중부소방서 식당 환경개선공사 기본 계획

노후시설 개선 등으로 쾌적하고 위생적인 식당 환경조성을 통하여 직원 처우개선 및 복지증진 제고함으로서 대시민 고품질 소방서비스 향상에 기여하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 市 소방행정과-95(2016.1.4.)호「2016년도 소방안전특별회계 예산 편성 결과 알림」

□ 市 소방행정과-1128(2016.1.13.)호「2016회계연도 세출예산 재배정 계획 알림」

□ 市 소방행정과-3182(2016.2.4.)호「예산 조기배정 및 집행 추진계획 알림」

Ⅱ		추진배경

□ 30년이상의 노후 소방청사로 식당 내부 누수·균열·환기불량 등 개선 필요

□ 식당 공간협소 문제 해결 및 쾌적하고 위생적인 식당 환경 조성 등

Ⅲ		추진계획

□ 추진개요

○ 사 업 명 : 중부소방서 식당 환경개선공사

○ 사업기간 : 2016. 3. 16.(수) ~ 5. 30.(월)

○ 공사대상 : 지하1층 식당(94㎡) · 주방(27㎡) · 대기실(10㎡) · 계단(14㎡)

○ 예산금액 : 금55,000천원(금오천오백만원)

○ 계약방법 : 나라장터 전자공개수의계약(G2B)

○ 관련근거

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조 제1항 제5호

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영요령

□ 공사내용

○ 식당 환경의 현대화 추진 : 내부 인테리어 개선으로 아늑한 환경 개선

○ 주방 위생관리 제고 : 바닥·벽 타일 등 교체로 위생적인 조리 환경 구축

○ 쾌적한 에너지 고효율의 공간 조성 : LED조명등 교체 및 맞춤형 수납공간 제작등

□ 평면도

식당(94㎡) · 주방(27㎡) · 대기실(10㎡) · 계단(14㎡)

□ 현실태 사진

Ⅳ		예산현황

□ 예산 배정액 : 금55,000천원(금오천오백만원)

□ 예산과목

○ 소방관서 보수·보강공사 / 시설비 : 금55,000천원

- 소방청사 환경개선 : 금26,000천원

- 소방청사 보수·보강공사(식당개선공사,보수보강) : 금29,000천원

Ⅴ		세부일정

일 정		주 요 내 용	비 고
3월 4일 ~ 3월11일	7일	식당 환경개선 관련 의견수렴	· 각 과 및 현장대응단
3월16일 ~ 3월23일	7일	기술용역 타당성 심사요청	· 市 기술심사담당관
3월23일 ~ 3월25일	2일	설계용역 계약 체결(수의계약)	· 나라장터 이용(G2B)
3월25일 ~ 4월19일	25일	설계용역 착수~완수	-
4월19일 ~ 4월26일	7일	공사 발주 공고(전자공개수의계약)	· 나라장터 이용(G2B)
4월26일 ~ 4월27일	1일	공사 개찰 및 계약 체결	-
4월18일 ~ 5월22일	25일	공사 착공 ~ 준공	· 착공일로부터 25일
5월22일 ~ 5월30일	8일	준공검사 및 대금지급	-

Ⅵ		기대효과

□ 식당 노후 시설물 보수를 통한 급식의 질 향상 및 위생관리 개선

□ 쾌적한 직장 환경조성에 따른 업무효율 증대 및 근무환경 개선.  끝.