문서번호	시설보수과-649
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	01/29 이규상
협조

“2014년” 도로시설물 보수공사 및 진단·점검용역 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

강서도로사업소

(시설보수과)

2014년 도로시설물 보수공사 및 진단·점검용역 발주계획

시설보수과에서 유지관리하고 있는 도로시설물의 2014년도 보수공사 및 진단·점검용역 발주계획을 수립 시행함으로써 공사 및 용역의 내실화와 시설물의 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 2014년 보수공사 및 진단·점검용역 발주 대상시설물 현황

구 분		계	일반 교량	고가 차도	입체 교차	지하 차도	복개 구조	터널	비고
관리시설물		57	18	9	4	17	4	5
단 위 공 사		8	3	3	-	1	-	1	일상유지 보수공사 별도
소 계		32	10	7	1	11	2	1
진단 점검	안전진단용역	3	1	1	-	-	1	-	1종
	정밀점검용역	7	1	4	-	2	-	-
	자체 정밀점검	22	8	2	1	9	1	1

□ 예산현황 : 약 7,631백만원 (‘14년 예산  약 6,707 // ’13년 예산  924)

○ 보수공사 : 약 6,400 백만원 (‘14년 예산 약 5,776 // ’13년 예산 사고이월 624)

▷ 2014년 예산 : 약 5,776 백만원

- 단위공사 : 8건  3,690백만원

․ 여의2교 보수공사                 730백만원

․ 양화교 보수공사                  250백만원

․ 신정교 보수공사                  170백만원

․ 개봉고가 보수공사(2014년)      1,500백만원

․ 가리봉철도고가 보수공사          350백만원

․ 오류고가차도 보수공사            240백만원

․ 화곡터널 보수및포장공사          250백만원

․ 공항입구지하차도 보수및포장공사  200백만원

- 도로시설물 일상유지보수공사 : 약 2,086백만원

․ 터널,복개,지하차도 6,067백만원/6개사업소 ≒ 1,011백만원

․ 교량 6,452백만원/6개사업소 ≒ 1,075백만원

- 도로시설물 세척용역 : 일상유지보수공사 예산 일부 활용

▷ 2013년 예산 : 사고이월 624백만원

- 개봉고가차도 보수공사(2013년) : 624백만원

○ 진단 및 점검용역 : 931 백만원

▷ 2014년 예산 851 백만원

- 정밀안전진단 용역 :  3개 시설물 491,872천원

- 정 밀 점 검 용 역 :  7개 시설물 174,508천원

- 자체 정밀점검 : 14개 시설물 179,457천원(외부전문가 수당)

- 긴급 및 해빙기점검 : 57개 시설물   5,000천원(외부전문가 수당)

Ⅱ		추 진 방 향

○ 보수공사 및 안전진단·점검은 부득이한 경우 이외 도로시설물 담당자가 관련업무 수행 원칙

○ 보수공사는 시설물별 예산이 소규모인 경우 (5억원 이하) 3개소 내외 시설물 통합 발주

○ 공사감독은 단위공사는 시설관리공단에 위탁하고, 일상유지보수공사는 사업소에서 직접 수행

○ 정밀점검 용역은 4개소 내외 시설물을 통합하여 발주

○ 안전진단․정밀점검 용역의 내실화를 위하여 용역비 1억원 이상(부가세 제외)은 PQ 발주

○ 용역 사업수행능력 세부평가기준 및 표준과업내용은 도시안전실(도로시설과) 하달 방침에 의거 시행

○ 자체 정밀점검의 외부전문가는 시설물의 진단 및 점검역량이 풍부하고, 우리사업소 시설물에 대한 진단․점검 경험이 많은 자로 선정

Ⅲ		세부추진계획

□ 보수공사

구 분	공 사 명	공 사 규 모	소요예산 (백만원)	발주 방법	비고 (담당자)
계	5 건		약 5,776
단위 공사	개봉고가 보수공사	- 재포장(SMAT-CON) : 1,535㎡ - 아스콘 재포장(보도,토공부) 3,124㎡ - 단면보수·표면처리: 1,800㎡ - 기타공사: 배수시설, 신축이음, 교좌장치 보수 등	1,500	일반경쟁	시설6급 류춘광
	여의2교 보수공사	- 균열보수 370m - 신축이음 보수․보강 100m	730	〃	시설6급 천석기
	신정교 외 2개소 보수공사	- 신정교(170) - 가리봉철도고가(350) - 오류고가(240)	760	〃	시설7급 이승행
	화곡터널 외 2개소 보수공사	- 화곡터널(250) - 공항입구 지하차도(200) - 양화교(250)	700	〃	시설6급 천석기
도로시설물 일상유지보수공사		- 도로시설물 57개소 보수	약 2,086	〃	시설7급 전재형

※ 2013년 개봉고가차도 보수공사(사고이월 624백만원) - 담당 시설6급 류춘광

○ 추진계획

- ‘14. 2  : 공사 현장조사 및 물량산출, 공사감독 위탁(시설관리공단) 의뢰

- ‘14. 3  : 공사 설계내역서 작성 및 계약심사의뢰, 발주

- ‘14. 4  : 공사계약 및 착공

- ‘14. 4. ～ ‘15. 2  : 공사시행 및 준공

□ 정밀안전진단·정밀점검

구 분	용 역 명	대 상 시 설 물			예산 현황 (천원)	발주 방법	비고 (담당자)
합 계		32개소			845,837
정밀 안전 진단 (3건)	소계	3개소			491,872
	오류고가 정밀안전진단용역	오류고가차도	1종	B	112,133	제한 경쟁	시설6급 류춘광
	신정교 정밀안전진단용역	신정교	1종	B	160,553	PQ	시설7급 이승행
	도림천복개(좌안) 정밀안전진단용역	도림천복개(좌안)	1종	B	219,186	PQ	시설7급 이승행
정밀 점검 용역 (3건)	소계	7개소			174,508
	개봉고가(철도구간) 외 1개소 정밀점검용역	개봉고가 (철도구간) (19,200)	2종	C	38,900	제한 경쟁	시설6급 류춘광
		가리봉철도고가 (철도구간) (19,700)	2종	C
	여의2교 정밀점검용역	여의2교	2종	C	30,100	“	시설6급 천석기
	광명고가 외 3개소 정밀점검용역	광명고가(17,638) + 계측용역	1종	B	105,508 +α (광명고가 계측)	PQ	시설7급 전재형
		오류철도고가(26,750)	법정외	B
		외발산지하차도(35,290)	1종	B
		고척2지하차도(25,830)	법정외	B
자체 정밀 점검 ※20백만원 이하 9개조로 시행계획 별도 수립 시행 예정	소계	22개소			179,457	외부전문가 합동	점검수당 지 급
	화곡고가외 3개소	화곡고가(10,495)	법정외		36,125	자체 시행	시설6급 천석기
		목동교(12,796)	2종
		행주1교(6,730)	법정외
		행주2교(6,104)	법정외
	등촌지하차도외 2개소	등촌지하차도(9,868)	2종		23,749	“	시설6급 천석기
		목동교서측지하차도(4,431)	법정외
		국회앞지하차도(9,450)	2종
	가마산고가외 3개소	가마산고가(8,195)	법정외		31,317	“	시설7급 전재형
		화곡터널(5,477)	2종
		가마산지하차도(8,613)	2종
		개화지하차도(9,032)	2종
	오금교외 3개소	도림교구로(7,359)	법정외		36,544	“	시설7급 이승행
		오금교(11,959)	2종
		오목교(10,913)	2종
		개화IC(6,313)	법정외
	오금지하차도외 4개소	오금지하차도(9,032)	2종		35,123	“	토목운영 7급 조정갑 (천석기)
		오목지하차도(9,660)	2종
		구로지하차도(8,404)	2종
		성산지하차도(2,968)	법정외
		신정교접속교(5,059)	법정외
	개봉교외 1개소	개봉교(7,568)	법정외		16,599		시설6급 류춘광
		개화천복개(9,031)	법정외

○ 추진계획

- 2014. 3  : 설계서 및 과업내용서 작성, 용역 발주

- 2014. 4. : 용역계약 및 착수 (PQ는 사업수행능력 심사)

- 2014. 5. ~ 12. : 용역시행 및 준공

Ⅳ		기 타

○ 보수공사 특정제품(공법) 선정 심의위원회 개최

- 대    상 : 제품 – 자재비 5천만원 이상구매,  공법 - 1억원 이상 시공

- 개최일시 : 2014. 3월(예정)

- 개최장소 : 사업소 관리동 2층 회의실

- 참석인원 : 7인 (내부위원-4인, 외부위원-3인 내외)

○ 진단 및 점검용역 통합발주에 따른 대가 산출기준

- 산출기준 : 안전점검 및 정밀안전진단 대가(비용산정) 기준

(국토해양부 고시 제2009-787호, ‘09.08.24)

- 통합발주에 따른 대가기준 : 도로시설물 안전점검 및 진단용역 발주기준

(시설안전정책관, 도로시설과-5060호(‘13.3.21), 5113호(‘13.3.22))

○ 자체정밀점검 안전점검비 산출기준

(기존 도시안전실 방침을 기준으로 시설물의 규모 및 난이도에 따라 조정)

- 법정외 시설물 연장 50M 이상은 도시안전실 기준의 80%적용 (8일 x 0.8= 6일)

- 법정외 시설물 연장 50M 미만은 도시안전실 기준의 50%적용 (8일 x 0.5= 4일)

- 옹벽은 법정외 시설물 기준으로 도시안전실 기준의 50%적용 (8일 x 0.5 = 4일).

끝.