투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	김수호 귀하(06246 서울특별시 강남구 논현로 419 (역삼동)9층 피엠케이빌딩)
(경유)
제목	부진공정만회대책 매월 제출 및 공정관리등 건설사업관리용역 수행 철저

1. PC재사용16-080(2016. 3. 3)호, 건축부-2422(2016. 2.26)호, 건축부-2085(2016. 2.19)호, 건축부-14369(2015.12.15.)호와 관련입니다.

2. 우리시와 건설사업관리용역계약 체결하여 재사용플라자 건립공사에 대하여 건설사업관리용역 수행이 부실함을 알려드리오니, 귀 사에서는 용역준공시까지 대표이사 명의로 매월 3일까지 부진공정만회대책(안전관리포함) 제출 및 아래와 같이 사안에 대하여 조치하여 주시기 바랍니다.

1) 2016. 3. 16 현재 재사용플라자 건립공사 공정율

○ 계획 32.09% 대비 실시 26.47%로 82.47%로 17.53% 공기지연되고 있으므로 2차공사계약이행 될 수 있도록 가능한 방안 및 대책 수립하시기 바람

2) 2차수공사 계약 이행에 차질이 없도록 인력, 장비, 자재, 자금을 적기 투입토록 추진(2차수공사계약 이행을 위한 시공사 인력보강등 필요한 조치 포함) 및 공정관리, 안전관리, 품질관리 철저

3) ㈜펨코엔지니어링건축사사무소 대표이사, 동원건설산업(주) 및 ㈜서우건영 임원, 책임건설사업관리기술사, 현장대리인이 참석하는 주1회 부진공정 만회대책회의 개최하여 부진공정 분석 및 공기만회대책 수립·시행

3. 추가로, 연결데크 설계용역도 2016. 3월중으로 완료될 수 있도록 추진하시고 2차공사계약(2016. 6.30준공) 이행에 차질이 없도록 조치하여 주시고 향후 공정관리 및 안전관리에 철저를 기하여 건설사업관리용역 수행 부실에 따른 불이익 행정처분을 받지 않도록 용역 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 1. 부진공정 만회대책 관련 공문 사본 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	代김찬유		건축부장	03/17 안재혁
협조자
시행	건축부-3310	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)