문서번호	계획설계과-2326
결재일자	2016.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	계획설계과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
김형식	이임섭	이규상	03/17 정중곤
협 조

‘사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역’

준공기한 연기 보고

2016. 3.

상수도사업본부

급 수 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역’

준공기한 연기 보고

‘사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역’과 관련하여 서울특별시 도시공원위원회 공원조성 심의 절차 이행과 심의 결과를 설계에 반영하기 위한 기간이 소요되어 용역 준공기한을 연기하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역

□ 용역내용

○ 배수지 건설 용량  : 5,000㎥

송배수관 부설 : 구경 400~500㎜, 연장 1.6㎞

○ 총사업비 : 9,085백만원

□ 용역기간 : 2015. 5. 13. ~ 2016. 3. 31.

□ 용역업체 : ㈜삼안, ㈜유신

□ 계약금액 : 263,197천원

Ⅱ		추 진 경 위

□ 용역 착수                                          : ’15. 5. 13.

□ TF팀 회의                                         : ’15. 5. 19.

□ 착수보고회 개최                                    : ’15. 6. 16.

□ 중간보고회 개최                                    : ’15. 9.  24.

□ 도시계획시설(수도공급설비) 결정(안) 열람공고 : ’15. 11.  22. ～ 12. 5

○ 도시계획시설 결정 요청 : ’15. 10. 30.(급수부 → 본청 시설계획과)

□ 설계경제성 심사                    : ’15. 11.  23. ~ ’16. 1. 12.

○ 시스템 동바리 체택 등 26개 대안 채택(공사비 절감액 : 251백만원)

□ 용역 준공기한 1차 연기                           : ’15. 12.  10.

○ 설계경제성 심사, 도시계획위원회 및 도시공원위원회 심의절차 이행과 심의 결과 설계 반영을 위한 소요기간 필요

※ 당초 준공기한 : ’16. 1. 7,      변경 준공기한 : ’16. 3. 31(84일 연기)

□ 서울특별시 도시공원위원회 자문 부결               : ’15.12.15.

○ 도시계획시설 중복결정(배수지, 공원)을 위한 사전 자문

□ 서울특별시 도시공원위원회 자문 재상정(조건부 동의) : ’16. 1.  19.

□ 서울특별시 도시계획위원회 심의 통과                 : ’16. 3. 2.

○ 사당배수지 도시계획시설(수도공급설비) 결정 심의 : 원안 가결

□ 서울특별시 도시공원위원회 공원조성(안) 심의 상정의뢰 : ’16. 3. 10.

(급수부 → 관악구 공원녹지과)

○ 사당배수지 도시계획시설(수도공급설비) 결정(안) 원안가결에 따른 “까치산근린공원 조성계획(변경) 결정(안)” 공원심의(’16. 4. 19. 예정)

Ⅲ		준공기한 연기사유

□ 서울특별시 도시공원위원회 심의절차 이행 및 심의결과 설계 반영에 따른 소요기간 필요

○ 서울특별시 도시공원위원회 심의(예정)        : ’16. 4.19.(예정)

- 사당배수지 건설 관련 “까치산근린공원 조성계획(변경) 결정(안)” 심의

○ 공원조성(안) 심의결과 설계반영 및 성과품 작성 등 : ’16. 5.18.까지

Ⅳ		준공기한 연기

○ 당초 : 2015. 5. 13. ~ 2016. 3. 31.

○ 변경 : 2015. 5. 13. ~ 2016. 5. 18.(48일 연기)

※ 지체상금 부과 여부 : 미부과. 끝.