급수공사 준공 연기 보고(신설 158)

주무관	급수운영과장			결재
박종대	03/17 代배성호
협 조

문서번호 :	급수운영과-6238

2015년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약) 감독업무 수행중 급수공사 준공기간 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016. 03. 17.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 박종대

공사현황

공사명 : 2015년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약)

도급자 : 대평건설(주) 대표 이규억

공사현황

연번	접수번호	공사종류	위 치	수요가명	공사기간	비고
1	201501190221	신설-158	*********************	*******	‘16.02.11 ~ ’16.03.21

연기요청사유

사유 : 해당지번 급수공사 예정지에 수요가 휀스미철거 및 자재적재로 인하여 급수공사 가능시까지 급수공사 연기하고자 함.

검토결과

상기와 같은 사유로 상수도 급수공사 준공기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	*********************	*******	‘16.02.11 ~ ’16.03.21	‘16.02.11. ~ ’16.03.31

귀책사유 : 동부수도사업소장

지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 급수공사연기 요청서 1부. 끝.