문서번호	방재안전시설부-1565
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재안전시설부장
조동협		서관석	01/29 박종웅
협 조

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

최종설계도서 검토 정례회의(1차) 결과 보고

2014. 1

도시기반시설본부

(방재안전시설부)

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

최종설계도서 검토 정례회의(1차) 결과 보고

▢ 회의개요

○ 일   시 : 2014. 1.24(금) 14:00 ~ 15:30

○ 장   소 : 현장사무실

○ 참석인원 : 총 10명(도시본, 설계사, 감리단, 시공사, 특허사)

▢ 회의안건

○ 서울대 정문 앞 P.C 저류조 설치 방안

○ 서울대 정문 앞 유출관로 선형변경 문제

○ 서울대 정문 앞 유입부 서울대 요구사항 처리 방안

○ 임시저류조 관로 철거 방안

▢ 회의내용

○ 서울대 정문 앞 일부 P.C저류조를 현장타설 콘크리트로 변경하여 교통처리계획에 부합하도록 보완설계 예정임.(특허사)

○ 유출관로 선형 변경에 대해서 강남순환 6-1공구 GS건설사로부터 설계도면을 받아 내용검토한 결과 통합집수정과 TRcM구간 사이 개착박스 상부로 통과가 가능함.(설계사)

○ 서울대 유입부 관로의 선형에 대해서는 서울대 이견이 없으나 다만 시공시 보도와 차도를 점용하게 될 40m 구간에 대해 장기점용으로 인한 불편이 예상됨을 문제시함.(설계사)

○ 보도와 차도 점용구간은 장비가 임시로 점용하는 구간이므로 시공사에서 시공계획서를 작성하여 서울대에 가서 이해 설득을 하는 것이 바람직 함.(도기본)

○ 임시저류조 관로 철거는 GS건설사와 협의결과 전체 관을 철거해 달라는 요구가 있음.(설계사)

▢ 회의결과

○ P.C 저류조 설치방안에 대해서는 다음 정례회의 때 조금더 구체적인 계획을 가지고 다시 한 번 토의토록 함.

○ 유출관로 선형변경건에 대해서는 설계사에서 하천관리과와 별도협의하기 바람.

○ 서울대 유입부 관로시공에 대한 문제는 공사중 장비로 인한 불편사항을 문제시하므로 구정이후 시공사는 시공계획을 수립하여 도기본과 함께 서울대와 면담을 통한 이해 설득을 실시토록 함.

○ 임시저류조 관로 철거에 대해서는 설계사에서 하천관리과와 협의 후 그 결과를 설계내역에 보완 후 도기본에 제출하여 주기 바람.  끝.