서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경계약의뢰(국세청 별관 부지 발굴(시굴) 조사용역)

1. 공공재생과- 2534호(2016.3.17)와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 우리 부서에서 발주한 「국세청 별관부지 발굴(시굴) 조사용역」의 계약 내용을 아래와 같이 변경하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 국세청 별관 부지 문화재 발굴(시굴)조사 용역

2) 용역기간 : 2015. 9.25 ~ 2016.3.31

**********************************************

******************

나. 변경내용 : 용역기간 연장 및 용역비 증가

구분	당초	변경	비고
용역기간	***********************	***********************	*************
용 역 비	********	********	**********

다. 변경사유

- 문화재청 발굴변경허가(문화재청 발굴제도과-1771(2016.2.11.)호)

․사  유 : 시굴조사결과에 따른 정밀발굴 전환

- 정밀발굴 전환에 따른 조사기간 연장 및 조사비용 증가로 인하여 설계변경 계약체결 필요

따로붙임 : 1. 국세청별관 부지 발굴(시굴) 조사용역기한 연장보고 1부,

2. 서울 중구 국세청별관 문화재발굴조사 약식보고서 1부,

3. 국세청 별관 부지 문화재조사용역 설계변경 실정보고서 1부. 끝.

	공공재생과장
주무관	천주영		사업협력팀장	代안중욱		공공재생과장	03/17 홍선기
협조자	주무관	김성만
시행	공공재생과-2539	(		)	접수		(		)
우	04524	서울 중구 세종대로 110 서울시청 11층 공공재생과	/
전화	02-2133-8653	/전송	02-2133-0885	/	chjy0130@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)