문서번호	소방행정과-3650
결재일자	2016.3.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
이호경	황인대	윤은생	03/17 이귀홍

당산119안전센터 옥상 증축 및 기타 공사 계획

2016. 03. 10

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

당산119안전센터 환경개선을 위한 옥상증축 및 기타 공사

당산119안전센터 표준 기준 면적보다 협소하여 옥상층

일부 증축하여 노후된 체력단련장을 개선하고, 2층 센터장실

등을 이전하여 효율적인 사무공간 배치 및 근무환경 개선하고자 함.

Ⅰ. 추진근거

소방행정과-96(2016.01.04.)호 『2016년도 소방안전특별회계 예산편성 결과 알림』

소방행정과-11582(2014.07.16.)호 『준공검사(감독)조서(당산119안전센터 내진보강 추가 공사)』

소방행정과-10246(2014.06.24.)호 『준공검사(감독)조서(당산119안전센터 내진보 강공사)』

Ⅱ. 건물현황

건물명	소재지	대지면적 ㎡ (평)	건물구조	연면적 ㎡ (평)	준공년월
당산119 안전센터	영등포구 양평로 70-1	360.7 (109)	철근콘크리트	2/1층 400.04 (121)	1994.10 (2004.12 리모델링)

Ⅲ. 예산현황 및 계약방법

예산배정액   : 금111,300천원(옥상증축 78,300, 처우개선 33,000)

예산과목  : 직무환경개선/소방관서보수보강/시설비(401-01)

계약방법  : 일반경쟁입찰 (전자공개 수의계약)

Ⅳ. 옥상 증축 및 주요 공사내용

옥상 체력단련장 센드위치 패널 및 서고 철거후 증축(약 58㎡ )

2층 샤워장 방수(타일 교체 등)

2층 센터장실(17.3㎡) → 옥상 증축후 이전

【1층 팀장 출동대기실(13.5㎡) → 2층 센터장실】

1층 팀장 출동대기실 → 휴게실로 설치 (현재 직원 휴게실 없음)

※ 실시설계 과정에서 센터장실 옥상 이전시 냉· 난방 관련 문제점을

미 확보땐 센터장실 옥상 이전은 재검토

옥상 증축부분 슬래브 보강 (철판길이 30mm×철판두께4.5mm×100mm 간격) 등

- 설계과정(구조계산)에서 검토후 최종 확정

기타 : 후정 주차장 담벽 철거 등

Ⅴ. 추진 일정

기술용역 타당성 심사의뢰     : 2016. 03.21. ~ 03.28.(8일간)

기본설계 및 실시설계    : 2016. 04.01. ~ 04.30.(30일간)

입찰공고 및 계약체결   :  2016.  05.01.  ~ 05.10.(10일간)

착공 및 준공          : 2016.  05.11. ~ 06. 30.(50일간)

붙임  1. 당산119안전센터 옥상체력단련장 및 서고 사진 1부.

2. 평면도 1부.

3. 당산119안전센터 청사환경 주요개선 우선순위 1부.

4. 당산119안전센터 구조(내진)안전진단 용역 결과보고서 요약  1부.  끝.