급수공사 준공기한 연기 보고서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김병주	함현준	03/18 박길영

	명에 의하여 『2015년 신공덕동외 6개동 상수도공사』시행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.
2016. 3. 18.
보 고 자 : 직 지방시설서기 성명 : 김병주

복 명 내 용
건 명	준공기한 연기 보고서(마포구 **********)
내용	1. 공사위치 : 서울시 마포구 ********** 2. 작업지시번호 : 신설–161 3. 급수공사 종별 : 신설 4. 보고 내용 - 상기 위치에 급수공사 작업지시하였으나, 수요가의 개인사정으로 인해 현장공사 진행이 정지된 상태로 급수공사기간 연기을 요청하여 공사기간내 공사가 불가능한 실정임 5. 조치의견 - 상기 위치의 급수공사 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다. ◆ 당초 공사기간 : 2015. 12. 8 ～ 2016. 3. 15 변경 공사기간 : 2015. 12. 8 ～ 2016. 4. 19 6. 지체상금 부과여부 : 미부과
비 고

끝.