문서번호	도시철도토목부-3262
결재일자	2016.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
안태현		代김용선	03/18 김진팔
협 조
	주무관			김용선

『지하철9호선 922공구 폐기물처리용역(총괄)』

계약기간 조정 검토 보고

2016. 03

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『지하철9호선 922공구 폐기물처리용역(총괄)』

계약기간 조정 검토 보고

『지하철9호선 3단계 922공구 건설공사 폐기물 처리용역』과 관련 계약기간 조정에 대해 검토 보고 드림. ※ 선진엔지니어링 지감922-16-098호(‘16.03.14)

1		용역개요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 폐기물처리용역

○ 용역금액 : 금243,773,000원

○ 용역기간 : ‘10.11.10 ~ ‘16.03.21

○ 계 약 자 : (주)삼보ENT

2		계약현황

○ 폐기물 처리용역 계약현황(차수별)

구 분	수 량(톤)			금 액(원)	기 간	비 고
	계	폐콘크리트	폐아스콘
총괄	14,829	4,538	10,291	243,773,000	2010.11.10. ~ 2016.03.21
1차	3,348	614	2,734	54,160,000	2010.11.10. ~ 2012.02.29	준공
2차	1,113	193	920	18,000,000	2012.03.01. ~ 2013.02.28	준공
3차	1,110	249	861	18,000,000	2013.01.29. ~ 2014.02.28	준공
4차	564	564	-	10,000,000	2014.02.06 ~ 2015.02.28	준공
5차	5,259	2,418	2,841	88,000,000	2015.03.01 ~ 2015.12.31	준공
장래	3,435	500	2,935	55,613,000

○ 폐기물 처리용역 변경사항

구 분		당 초	변 경	비 고
폐기물	폐콘크리트	4,538(ton)	4,538(ton)	변경없음
	폐아스콘	10,291(ton)	10,291(ton)	변경없음
계약금액		243,773,000원	243,773,000원	변경없음
계약기간		‘10.11.10. ~ ‘16.03.21.	‘10.11.10. ~ ‘16.12.31	(증 285일)

3		책임감리원 검토의견

○ 지하철 9호선 3단계 공사기간 건설폐기물에 대해서도 발생시기를 감안하여 준공기한 연기를 요청한 사항으로 공사추진 일정을 고려 건설폐기물 처리용역(총괄)준공기한을 본부방침에 의거 우선 2016년 말까지(당초 : ‘16.03.21. → 변경 : ’16.12.31.) 변경함이 타당한 것으로 판단됨.

4		조치계획

○ 책임감리원 의견과 같이 9호선 3단계 건설사업 공사기간 조정에 따라 현재 진행중인 폐기물 처리용역(총괄)의 용역기간을 변경하는 것이 타당하므로 준공기한 아래와 같이 연기하고자 함.

구 분	계 약 금 액		공 사 기 간		비 고
	당 초	변 경	당 초	변 경
총 괄	243,773	변경없음	2010.11.10. ~ 2016.03.21	2010.11.10. ~ 2016.12.31	285일연장

붙 임 : 1. 책임감리원 검토의견 및 준공기한 연기원 1부.

2. 설계내역서(총괄1회) 1부.  끝.