문서번호	방재시설부-3768
결재일자	2016.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	03/18 임춘근
협조

- 경춘철교 정비공사 -

가설사무실 변경에 따른 검토보고

2016. 3

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 경춘철교 정비공사 -

가설사무실 변경에 따른 검토보고

경춘철교 정비공사와 관련하여 가설사무실 변경에 따른 책임건설사업

기술자로부터 실정보고 사항이 접수되어 이에 대한 검토보고임

사업개요

❍ 공 사 명 : 경춘철교 정비공사

❍ 규    모 : 경춘철교 정비 L=176m

- 기초부 보수보강, 상판교체 신설 및 엘리베이터 설치, 상부포장 등

❍ 사업기간 : 2015. 1. 6 ∼ 2016.05.23

❍ 시 공 사 : 대흥토건(주)

❍ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소

❍ 도 급 비 : 3,922백만원

보고내용

❍ 경춘철교 정비공사에 따른 현장사무실을 조립식 가설건축물로 설치하는          것으로 설계하였으나. 현장내 설치장소가 협소하여 현장사무실, 창고,

품질시험실을 콘테이너로 사용

❍ 공사비 검토내용

구 분	규 격	단위	수량			금액(직접시공비/원)			비고
			당초	변경	증감	당초	변경	증감
감독및감리자		M2	100	-	-100	6,224,800	-	-6,224,800
현장사무실		M2	130	-	-130	8,092,240	-	-8,092,240
현장창고		M2	80	-	-80	3,901,760	-	-3,901,760
현장숙소		M2	100	-	-100	6,224,800	-	-6,224,800
시험실		M2	20	-	-20	1,011,580	-	-10,11,580
현장사무실(컨테이너)	3.0*2.6*6.0	EA	-	2	2	-	1,768,002	1,768,002
현장창고(컨테이너)	3.0*2.6*6.0	EA	-	1	1	-	790,302	790,302
직접공사비 계		식				25,455,180	2,558,304	-22,896,876
간접공사비 계		식				8,689,695	873,331	-7,816,364
공사비 계		식				34,144,875	3,431,635	-30,713,240

책임건설사업관리기술자 의견

❍ 경춘철교 정비공사 시행중 상기와 같이 가설사무실 변경에 대한 실정보고 검토결과, 가설사무소는 착공 당시 원활한 현장운영을 위하여 현재 운영중인 콘테이너로 설치하였으므로 설계에 반영된 조립식 가설사무소을 콘테이너로 변경함이 적정하다고 판담됨

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 가설사무실 변경에 대한 실정보고사항에 대하여 책임건설사업관리기술자 의견이 적정한 것으로 판단되므로 승인조치하고자 함

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부. 끝.