문서번호	서울특별시농업기술센터-4092
결재일자	2016.3.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
환경농업팀장	농업기술과장	농업기술센터소장
진우용	권혁현	03/21 김영문
협 조
	주무관		손형기
	주무관		홍선옥

2016년 온실 빗물이용 시설원예 안정생산 시범 추진계획

2016.  3.

농업기술과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 온실 빗물이용 시설원예 안정생산 시범 추진계획

❍ 지하수 오염 및 부족지역의 농업용수 확보하고 농업용수 수질

개선으로 고품질원예작물 생산기반 마련

❍ 물부족 대비 빗물을 이용한 자연 순환형 채소재배기술 보급

1

추진방향

용수부족  및 지하수오염 시설채소지에 우선 보급 설치

농업기술센터보유 실습교육장에 설치하여 대농업인 교육장으로 활용

농촌진흥청 기술이전 업체와 협의하여 특허기술부분과 비특허부분

분리하여 설치

2

근거법령

『농촌진흥법』제2조 제3항

『농촌진흥법』제16조(시범사업의 실시)

『농어업․농어촌 및 식품산업 기본법 』제34조(농어업투입재 산업의 육성 및 기계화‧시설현대화 촉진)

3

사업내용

사 업 량 : 1개소 (2,000㎡)

시범요인

❍ 빗물이용 시스템을 활용한 원예작물재배에 적합한 농업용수 확보로 연간

1,500톤 농업용수 절약

❍ 적합한 농업용수의 안정사용으로 품질향상 및 농가소득 증대

지원범위(주요 시설내역)

❍  빗물 집수장치, 초기빗물 배제장치, 여과장치, 빗물 저장탱크(0.2ha, 저장용량 100㎥(200톤), 관수장치, 보호시설 등

※ 노출형 P.E탱크시설보다는 체험교육장 환경을 위해 매립협 콘크리트

탱크로 설치 추진(관할구청과 법적사항 협의 )

- 수질 측정장치(pH, EC측정기 등), 유량계, 저온기 빗물 예열장치 등

예 산 액 : 50,000천원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 예산과목 : 신개발 원예기술 보급-(401)시설비-(01)

4

추진계획

시범사업 세부 추진계획

❍ 사 업 비 : 1개소(30,000천원 내외/개소)

❍ 사업대상지 선정 조건

- 농업시설의 설치에 대한 법적 제한이 없는 지역

※ 국토의계획및이용에관한법률, 보금자리주택건설에대한특별법 등 공공

개발 사업예정 및 지정이 되지 않은 지역

- 많은 농업인이 수시로 관찰할 수 있는 지역

- 해당하는 사업의 목적과 효과를 충분히 거둘 수 있는 곳

- 시설원예 주산단지 중 빗물이용시설 설치 가능한 지역

❍ 사업대상자 선정 기준

- 근 거 : 2016년 농촌진흥사업 시행지침(농촌진흥청)

- 공정한 대상자선발을 위한 농업산학협동 심의회 구성운영

❍ 사업대상지 선정

- 일자 : 농산학협동 심의회 선정 (2016.2.26.)

- 장소 : 농업기술센터 교육장내(강서힐링체험농장:강서구 개화동 )

· 힐링농원 공동운영 기관과 협의 어려울시 타 교육장으로 변경

❍ 시범사업 추진체계 및 요령

- 현장지형 여건상황에 맞춰 규모화 및 특성에 맞도록 설치

▶ 노출형 빗물저수탱크는 설치장소가 협소하여 매립형추진

▶ 매립형규모 선택시 주변여건 고려하여 규모 조정:200㎡→100㎡

- 시범사업 추진과정의 수량, 노력절감효과, 특품생산비율 등 사업성과를 분석할 수 있도록 기록장 작성

- 토양소독 전‧후 토양검사 실시, 시비처방에 의한 합리적 관비 실시

- 대표찰을 설치하되 규격 및 내용은 자체적으로 결정하되 농촌진흥청에서 추진하는 사업임을 표기

- 신기술 보급을 위한 사업단계별 교육 및 평가회 개최

❍ 설치업체선정 및 계약방법

- 농촌진흥청 기술이전업체와 일반 토목 시공업체 분리 발주 시공계약

- 빗물수집장치등 특허기술부분은 기술이전업체와 수의계약 추진

▶ 근거: 하자구분 곤란, 혼잡, 마감공사 및 특허공법 등에 따른 수의계약

(지방계약법시행령 제25조 제1항 제4호 가 ․ 나 ․ 다 ․ 마목)

- 빗물수집 저수조(콘크리트구조물)설치는 일반 토목공사로 분리하여

전자견적 입찰 추진 : 특허기술이전 업체의 토목공사능력의 부족 등          이유

❍ 사업추진 시기

- 사업 공고․홍보              : 2016. 1.11. ~ 2.3.

- 사업신청자 현지조사          : 2016. 2.15 ~ 2.19.

- 사업대상자 선정심의회        : 2016. 2.26.

- 시범사업추진 및 준공         : 2016. 3월 ~ 6월

- 시범사업 지도․감독 및 점검  : 2016. 3월 ~ 10월

- 시범사업 결과 평가회	: 2016. 10월

※ 상기일정은 사업추진 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

❍ 사업추진 순기표

세 부 내 용	추 진 시 기 (월)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
◦ 사업계획 수립 및 신청접수
◦ 신청대상 현지조사
◦ 선정 심의회
◦ 시범사업 추진 및 준공
◦시범사업 지도․감독 및 현지점검
◦ 사업결과 및 평가회

5

기대효과

자연순환형 채소 재배기술 보급

저장규모 100톤 장치에서 연간 약 750톤 농업용수 절감

6

행정사항

ATIS 활용 사업추진계획 입력

붙임 : 1. 빗물 이용시스템 설치 개략도(예시) 1부.

2. 빗물저수조(콘크리트) 매설 설치도 1부.  끝.