투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	운영1과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(주경기장 냉각탑 구매 및 교체공사)

1. 시설관리과-12892, 13273 계약의뢰 및 운영1과-24665, 조달청 장비구매팀-278664 계약체결 알림과 관련입니다.

2. 잠실주경기장 냉각탑 교체사업과 관련하여 다음과 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 연기내용

공 사 명	계약자	계약금액(원)	연기사유	준공기한
				변경전	변경후
잠실주경기장 냉각탑 구매설치	㈜성지공조기술	148,214,000	동절기 옥외공사로인한 안전사고 예방 및 공사품질 저하를 막고자 준공기한 연기	2014.2.20.	2014.4.20.
잠실주경기장 냉각탑 교체공사	플러스종합 기계설비	94,822,120	“	2014.2.20.	2014.4.20.

붙임 : 보고서 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	지양수		시설관리과장	01/29 신동호
협조자
시행	시설관리과-1152	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 송파구 잠실동 10번지	/	http://stadium.seoul.go.kr/
전화	02-2240-8817	/전송	02-2240-8777	/		/	대시민공개