투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	『경의선숲길 공원조성공사』- 새창고개 잔여구간 저촉건물 처리방안 검토 의견 통보

1. 공원조성과-3172(2016.3.16.) 호 및 경의경춘(감)2016-63(2016.2.29.)호와 관련입니다.

2. 경의선숲길-새창고개 잔여구간 저촉 건물(2개동) 처리방안에 대한 의견을 통보하니 검토 후 실정보고 하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

내 용	검토의견
경의선숲길 공원조성공사-새창고개 잔여구간 저촉건물(2개동) 에 대한 처리 방안	- 철거반대민원 · 보상요구 등으로 부분철거가 어려워 공원 개원에 지장을 초래한다면 점유건물은 존치하고 공원 조성함이 타당. - 공원 경계부 침입방지 및 미관을 위해 휀스와 장미등을 설치

붙 임 : 관련 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	03/21 임춘근
협조자
시행	방재시설부-3872	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 14층 방재시설부	/
전화	3708-8684	/전송	3708-8756	/		/	대시민공개