문서번호	정수시설과-789
결재일자	2016.3.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		김긍채	03/21 박기석
협조
	주무관		김효준

2016년도 정수장 및 취수장

전기설비 보수공사 연간단가 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2016년도 정수장 및 취수장

전기설비 보수공사 연간단가 발주계획

우리센터 정수장 및 취수장 전기설비의 효율적인 유지보수를 위한 연간단가공사를 아래와 같이 발주하여 정수처리시설 운영 및 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 기전설비과-2046(2016.3.11.)호에 의한「2016년도 기전설비 유지보수 연간단가계약 추진계획 알림」

□ 추진방향

○ 정수장․취수장 전기설비 유지보수 공사를 연간단가계약으로 발주하여 노후 전기설비에 대하여 적기에 정비하고 고장 발생시 긴급복구하여 유지관리 효율성 제고

○ 전기공사업체 사전 선정에 따른 긴급수의계약 대상건수 감축으로 업무처리의 투명성 높임

○ 기타교체비 예산 3건의 사업을 통합 발주하여 계약 및 공사감독 업무의 효율성 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 착공일 ～ 2016. 12. 31

○ 소요예산 : 198,000천원

○ 적용대상 : 정수장․취수장 노후 및 고장발생 전기시설물

○ 추진방법

- 본 공사는 작업지시서에 의하며, 계약상대자의 작업완료 후 기성 청구시 작업완료보고서에 의하여 정산 및 기성금 지급

○ 발주내역

- 정수장 전기시설물 노후 및 고장발생 보수공사

- 취수장 전기시설물 노후 및 고장발생 보수공사

- 정수지 전동밸브 및 UPS 비상전원 공급공사

※설계내역서는 예상물량을 산정하였으며 추가물량 및 신규공종 발생시 계약금액 내에서 선 작업지시 후 변경계약

□ 발주개요

○ 소요예산 : 198,000천원

- 정수장 전기설비 유지관리 : 90,000천원

- 취수장 전기설비 유지관리 : 33,000천원

- 정수지 전동밸브 및 UPS 비상전원공급 : 75,000천원

○ 예산과목

- 정수장 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

- 취수장 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비

○ 계약방법 : 일반경쟁입찰

○ 입찰자격 : 전기공사업법령에 의한 전기공사업 등록업체로서 주된 영업소의 소재지가 서울특별시 또는 경기도에 있는 업체

○ 계약기간 : 착공일로부터 2016. 12. 31까지

□ 향후일정

○ 2016. 03. 18 : 본부 기술검토 의뢰

○ 2016. 03. 24 : 공사발주(시행)

○ 2016. 04. 15 : 계약 및 착공

○ 2016. 12. 31 : 공사완료

붙 임 : 1. 공사설명 및 과업내용서 1부

2. 설계내역서 1부.

3. 견적서 1부. 끝.