서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(KTX 수서역 등 기반시설 입지에 따른 도로개선대책 타당성조사 및 기본계획 용역)

우리시에서 추진중인 ‘KTX 수서역 등 기반시설 입지에 따른 도로개선대책 타당성조사 및 기본계획 용역’에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : KTX 수서역 등 기반시설 입지에 따른 도로개선대책 타당성조사 및
기본계획 용역

나. 계약기간 : 2014. 6. 16 ~ 2016. 3. 31

다. 계 약 자 : ㈜동일기술공사, ㈜진우엔지니어링

라. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	439,745,000	437,029,000	감 2,716,000

마. 변경사유 : 자문비, 손해보험료, 경관설계비 등 정산 감액조치

바. 예산과목 : (교통사업특별회계) 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충, 탄천변
동측도로 확장, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경(정산) 보고 1부.
2. 변경설계서 1부.
3. 변경계약합의서 1부.  끝.

전문관	윤갑진		광역도로계획팀장	최연호		도로계획과장	03/22 하종현
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로계획과-3913	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 10층 도로계획과	/
전화	02-2133-8088	/전송	02-2133-0763	/	yunis777@seoul.go.kr	/	대시민공개