문서번호	건축부-3607
결재일자	2016.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김현지		안연수	03/22 안재혁
협 조

한양도성 경관저해시설 정비공사

설계변경 및 준공정산 검토 보고

2016. 3.

도시기반시설본부

건   축   부

한양도성 경관저해시설 정비공사

설계변경 및 준공정산 검토 보고

‘한양도성 경관저해시설 정비공사’와 관련하여, 현장확인에 따른 공사 물량조정 등 실정보고 건에 대한 설계변경 및 준공 정산(보험료 등) 내용을 검토 보고함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 한양도성 경관저해시설 정비공사

○ 정비내용 : 경관저해시설(군시설, 경계휀스, 철제말뚝 등) 철거 및 정비(총 50개소)

- 인왕산구간(20개소) : 콘크리트 배수조 1개소, 난간 6개소, 기타(안내판 등)
- 창의문주변(15개소) : 벤치 4개소, 난간 3개소, 기타(조경등, 목재 전신주 철거 등)
- 백악구간(15개소) : 군시설 3개소(경계휀스), 난간 3개소, 기타(에어브러쉬 등)

○ 공사기간 : 2015.10.13 ~ 2016. 03.24

○ 계약금액 : 총 320백만원

○ 시 공 자 : 원택건설(주)

○ 현 공 정 : 공사완료(공정률 : 100%)

□ 추진경위

○ `15.08.13 : 한양도성 주변 경관저해시설 정비사업 의뢰(한양도성도감→도기본)

○ `15.10.12 : 공사착수

○ `16.1.1~`16.2.14 : 동절기 공사 일시중지(45일간)

○ `16.03.11 : 공사의뢰부서(유지관리부서) 합동 예비준공검사 실시

○ `16.03.21 : 시공사 설계변경 및 정산 요청

□ 설계변경 내용

○ 계약금액 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
계약금액	320,000	318,033	1,967

○ 설계변경 및 준공정산 내역

(단위 : 천원)

연번	공사내용	세부항목	세부내역		공사비 (증・감)	비고
			당초	변경
1	인왕산구간 임시난간 철거 취소	철거 삭제	10경간	-	감 111
2	인왕산구간 목재안내판 설치 취소	설치 삭제	1EA	-	감 1,530
3	백악전망대 근처 탐방로정비 물량 조정	보도블럭철거 경계석 철거 구조물철거	- - -	32.5㎡ 21.5m 1개소	증 475
		야자매트 설치 (t30mm) 화살나무 식재 h0.6×w0.3	- -	50m 470주	증 6,406
		관로가림판 설치삭제	40.4m	-	감 6,800
		목재휀스 설치 h1.2×w1.5	42경간	52경간	증 3,036
		물량감소(지세할증)			감 519
4	창의문 보안등 철거 취소	보안등 철거 삭제 바닥전돌 깔기 삭제	5개소 1개소	0개소 0개소	감 73
5	청운공원내 폐목전주 철거	전선이설 추가	-	1식	증 393
6	폐기물운반 및 처리비 등	물량조정	1식	1식	증 4,086
7	흥인지문 성곽복원구간 상부 안전난간 설치	디자인난간설치	-	5경간	증 3,303
직접공사비 소계					증 8,666
제경비 등 정산(보험료, 이윤 등)					감 10,633
합 계(증・감액)					감 1,967

※기존항목 기존단가, 신규항목 낙찰률 적용(88.098%)

○ 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존관리활용, 한양도성보존정비, 한양도성 경관저해시설 개선을 위한 부지매입, 시설비(401-01)

□ 검토 및 처리의견

○ 현장지시 및 현장여건에 따른 공사물량 조정 및 단가산출, 제경비 등 정산 사항에 대한 내역을 검토한 바 적정하게 산출 반영되었기에, 계약변경 및 준공처리 시행코자 함.

붙 임  1. 시공사공문_설계변경 및 준공정산 요청보고서  1부.
2. 설계변경 및 준공정산 내역서 1부.
3. 원가관리시스템_계약금액검증확인서 1부.  끝