문서번호	토목부-5492
결재일자	2016.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	03/22 김영수

상수도관로(부단수) 흙막이 가시설 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2016. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

상수도관로(부단수) 흙막이 가시설 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

고덕산 구간 도로종단 인하에 따른 기존 상수도관로(D=700㎜) 이설계획에 따라 신설 상수도관로 연결 작업중인 암사정수장앞 사거리 부단수 및 제수변 맨홀 터파기 구간 흙막이 가시설에 대하여 검토 보고드림

관련근거

○ 상수도관로(D=700㎜) 이설승인(상수도사업본부 배수과-5585호,‘14.8.26)

○ 정수장앞사거리 상수도관로(부단수) 흙막이 가시설 실정보고 (선사고덕0420-58호, ‘16. 3.10.)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4 ~ 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설, ㈜청미건설

현 황

○ 고덕산 구간 상수도관로(D=700㎜) 이설공사에 대하여 상수도사업본부에 요청하였으나, 원인자부담으로 이설토록 승인되어 재설계 후 공사를 시행중 상수관로 부단수 및 제수변 맨홀 터파기 작업구간 흙막이 가시설은 설계에 반영이 안되어 있는 상태임.

추진경위

○ 2014.10. 7. : 상수도관 이설공사 설계도서(최종) 제출

○ 2014.12.15. : 상수도관 이설공사 실정보고 승인

○ 2014.12.28. : 상수도관(D=700㎜) 이설공사 착공

○ 2015.11.19. : 기존관 분기공사(부단수) 작업계획보고

검 토

○ 상수도관(D=700㎜) 이설공사에 따른 부단수작업 및 제수변 맨홀 설치를 위하여는 터파기 깊이가 4m ~ 6m로써 흙막이 가시설이 필요함.

○ 흙막이 가시설 공법 비교 검토 결과 작업기간 단축, 경제성, 안정성 등을 만족하는 조립식 간이흙막이(TS판넬) 공법으로 반영이 필요함.

- 조립식 간이흙막이(TS판넬) 설치 규모

‧ 부단수구간 : H=6.0m, B=5.0m, L=9.0m

‧ 관로매설구간 : H=4.0m, B=2.0m, L=11.0m

‧ 구조물구간(맨홀) : H=4.0m, B=6.0m, L=4.79m

○ 단가검토

- 「공사계약일반조건」 제7절 1. 나항에 의거 강제협의단간 적용

∴(강제) 협의율(90.57%)=〔설계가(100%)+낙찰율(81.143)〕/2

공사비 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비고
직접공사비	1식	4,523	35,105	30,582
제 경 비	1식	937	6,895	5,958
공사원가	1식	5,460	42,000	36,540
부가가치세	1식	546	4,200	3,654
도급공사비	1식	6,006	46,200	40,194
관급자재	1식	-	-	-
폐기물처리비	1식	-	748	748
총공사비	1식	6,006	46,948	40,942

감리단 검토의견

○ 상수도관로(D=700㎜) 부단수 및 제수변 맨홀 설치를 위한 조립식 간이 흙막이 가시설(TS판넬) 공법은 공기단축, 경제성, 안정성 측면에서 만족하고, 소규모공사에 적합한 최적의 공법으로 판단됨으로 반영이 필요하다고 판단됩니다.

※ 본 실정보고는 ‘공사계약 일반조건’ 제6절 공사 설계의 변경 5. 발주기관의 필요에 의한 설계변경을 근거로 설계변경 하고자 하며, 실정보고 서류 검토결과 내역서, 수량산출서, 단가산출서, 도면 등이 설계도서 작성 제반기준에 맞게 작성됨.

조치계획

○ 상수도관(D=700㎜) 부단수 및 제수변 맨홀 설치에 따른 흙막이 가시설 (TS판넬) 설치 계획에 대하여 감리단 검토의견과 같이 반영이 필요함.

○ 증액되는 공사비 40,942천원에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.