투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	용역기간 변경 계약 의뢰

1. 도시철도토목부-3384호(2016.03.21.)와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인“우이~신설 도시철도(경량전철) 민자투자사업  궤도공사 전면책임감리용역(계속공사)”에 대하여 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 우이~신설 도시철도(경량전철) 민자투자사업 궤도공사

전면책임감리용역(계속공사)

나. 계약금액 : 일금 1,137,873,000원

다. 계 약 자 : 동부엔지니어링(주), ㈜대한콘설탄트, ㈜한국종합기술

라. 변경사항 : 용역기간 변경

구 분		당 초	변 경	증,감	비 고
총차	계약금액	1,137,873,000원	1,137,873,000원	-	변경없음
	용역기간	2013.04.01. ~2016.03.24.	2013.04.01. ~2016.11.30.	증 220일
3차	계약금액	517,873,000원	517,873,000원	-	변경없음
	용역기간	2015.06.12. ~2016.03.24.	2015.06.12. ~2016.11.30.	증 220일

마. 변경사유 : 민간투자사업의 준공기한 연기로 궤도공사 감리용역의

원활한 수행을 위하여 준공기한 연기

붙임 : 1. 관련문서 사본 1부.

2. 설계변경 내역서(총차, 3차) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최경호		궤도과장	윤방식		도시철도토목부장	03/22 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-3481	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 9층	/
전화	772-7243	/전송	772-7306	/	ckh4815@seoul.go.kr	/	대시민공개