함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	2015년 홍제1동외 13개동 상수도공사 설계변경(최종) 계약의뢰

우리사업소에서 시행중인 “2015년 홍제1동외 13개동 상수도공사(장기계속단가계약)”에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 계약의뢰하오니 조치하여 주시기바랍니다.

가. 공  사  명 : 2015년 홍제1동외 13개동 상수도공사

나. 총공사기간 : 2015.06.09 ~ 2016.06.30

다. 계약상대자 : ㈜보승공영건설 대표 박상래

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 공 사 비		739,422,276	714,236,000	- 25,186,276
도급액	금차	74,239,276	122,601,000	48,361,724
	총차	521,638,276	570,000,000	48,361,724
관급자재비		217,784,000	144,236,000	- 73,548,000

라. 계약금액 변경사유 : 신축현장 증가 및 여건변화 등으로 물량 증·감

마. 공사개요 : 별첨 설계서 참조

바. 예산과목 :

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 개조공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

-  재난시스템구축, 소방용수시설설치, 소방용수시설등의설치 및 관리

소방용수시설보수, 시설비 및 부대비

-  재난시스템구축, 소방용수시설설치, 소방용수시설등의설치 및 관리

소방용수시설신설, 시설비 및 부대비

따로붙임 : 1) 계약금액 검토결과서 1부.

2) 설계변경 내역서 및 보고서1부.

3) 합의서 및 제비율검증 각 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	양재덕		급수설비팀장	代김찬모		급수운영과장	03/22 박길영
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-6392	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-3644	/전송	02)3146-3689	/	yangjd218@seoul.go.kr	/	부분공개(7)