의원 요구 자료 제출

시 행	도로계획과-3888
결재일자	2016.3.22.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

전문관		도로정책팀장	도로계획과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
정용훈		이승석	하종현	이택근	전결 03/22 김준기
협 조
	민자사업팀장				정회원

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 203번,이노근 국회의원, 국토교통위원회)

붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이노근 국회의원(국토교통위원회, 새누리당)

요구번호 : 203번

1. 서부간선도로와 동부간선도로 지하화 추진 현황

- 지금까지의 추진현황 및 향후 추진 일정 적시 요망

□ 의원님께서 요구하신 서부간선도로 지하화사업은 2016.3.1일 공사착공하여 현재 공사중으로 세부 추진현황 및 향후 일정은 아래와 같습니다.

○ 사업개요

- 사업위치 : 영등포구 양평동(성산대교 남단) ~ 금천구 독산동(금천IC)

- 사업규모 : 왕복 4차로, 연장 10.33km(소형차 전용)

- 사업기간 : 2010. ~ 2021.(운영기간 30년)

- 총사업비 : 5,200억원

- 사업시행자 : 서서울도시고속도로(주)

○ 추진경위

- '07.12.20	: 민간제안서 제출

- '08.12.08	: 사업제안서 타당성조사 완료(KDI PIMAC)

- '09.06.29	: 민간투자사업심의위원회 심의

- '09.12.31	: 제3자 제안공고  / '10.06.14  : 우선협상대상자 선정

- '14.12.18  : 기획재정부 민간투자심의위원회 심의

- '15.03.11  : 실시협약 체결

- '15.12.03  : 실시계획 승인

- '16.03.01  : 공사 착공

- '16.03.현재 : 공사중

○ 향후계획

- '21.02.  : 공사 준공(공사기간 60개월)

□ 동부간선도로 지하화사업은 2015.8.18일 민간투자사업으로 제안서가 접수되어 추진 여부등에 대하여 검토중에 있으며 향후 추진계획 및 일정 등 구체적인 방향은 정해지지 않았습니다.

※ 제안개요

- 위 치 : 영동대로 경기고앞 ~ 동부간선도로 월계1교

- 규 모 : 왕복4차로, 연장 13.5km. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과)	담당사무관	이승석 정회원
	☎ 2133-8065 2133-8073	주무관	정용훈 김정식
	작 성 일 : 2016. 3.