투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	『서울둘레길 안내센터 리모델링공사』설계변경(2회) 시행

『서울둘레길 안내센터 리모델링공사』와 관련하여 현장여건에 따른 공사물량 등의 변경사항이 발생되어 다음과 같이 설계변경(2회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울둘레길 안내센터 리모델링공사

나. 공사기간 : 2015.12.16. ~ 2016. 3.24.

다. 도 급 자 : ㈜쎄데코건설 대표 박만길

라. 설계변경내용

○ 관리실 기능유지를 위한 지상1층 평면계획 변경

○ 현장 여건을 고려한 우수계획 변경

(L = 9.5m→ 16.65m, 기존 트랜치 확장 W=300mm,L=12m, 집수정 위치변경)

○ 안내센터 바닥 마감재 변경(후로링마루 → 우드타일)

○ 지붕처마 접속부 기존 노후 아스팔트 싱글 추가 교체(28.86㎡ → 68.86㎡)

○ 문주설치 공종 제외 및 채널간판 등 물량 증가 등

마. 설계변경금액

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
도급비	공급가액	402,577,146	394,562,730
	부가가치세	40,257,714	39,456,273
	소계	442,834,860	434,019,000	감8,815,860
관급자재비		34,284,140	38,367,000	증4,082,860
총 공사비		477,119,000	472,386,000	감4,733,000

바. 예산과목

푸른도시국 자연생태과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물보호, 생태계보전사업, 서울둘레길 유지관리, 시설비

붙임 : 1. 설계변경증감내역서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율검증 1부.

4. 검토보고서 1부.  끝.

주무관	박대석		시설팀장	김경수		시설과장	김한준		중부공원녹지사업소장	03/23 代김준현
협조자
시행	시설과-2019	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02********69	/	2009028414@seoul.go.kr	/	부분공개(5)