문서번호	시설보수과-2314
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	03/24 신현태
협조

개봉철도고가 보수공사 발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

강서도로사업소

시설보수과

개봉철도고가 발주계획 보고

2016년 시행 예정인 『개봉철도고가 보수공사』에 대한 발주계획을 수립 하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

공 사 명 : 개봉철도고가 보수공사

위    치 : 구로구 개봉동 235 (남부순환로)

사업개요 : 교면포장 29.6a, 교면방수 2,960㎡, 단면보수 100㎡, 표면처리 330㎡

사업기간 : 착공일로부터 120일간

사 업 비 : 530백만원

예산과목 : 교량관리, 고가차도 및 입체교차로관리, 개봉철도고가 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅱ		현 황 보 고

보고내용

정비대상 재검토(당초 편성요구예산 540백만원)

- 정비대상(당초 요구) : 교면포장 28.00a, 단면보수 542㎡ 등

- 재검토 후 반영물량 : 교면포장 29.60a, 표면처리 330㎡ 등

교면포장 및 단면보수 등 주요 정비물량은 본 공사에서 시행하고, 기타 보수대상 물량은 일상유지보수공사를 활용하여 정비보수코자 함

Ⅲ		기타 검토 및 추진사항

발주방법 및 참가자격

입찰방법 : 제한경쟁입찰

입찰참가자격 :『건설산업기본법시행령』 제7조에 의한 시설물유지관리업 등록 업체로서 주된 영업소의 소재지가 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시에 소재한 업체

하자담보책임기간 : 준공검사일로부터 2년

※ 건설산업기본법 시행령 제30조 〔별표 4〕

특정제품 공법 선정

선정공법

가. 교면방수 공법

- 교면포장 : 29.6a (폭4~4.16m × 연장148m × 5차로), 뚜께 8㎝

- 제품선정비 : 170백만원

나. 선정방법 : 특정제품(공법)선정심사위원회 공법별 비교(안) 후 최적의 공법선정(의결)

개질아스팔트콘크리트 구매 발주

절차 및 계약방법

- 물품구매계약 심사요청 (계약심사과)

- 계약심사 후 입찰공고 (재무과)

구매개요

- 규 격 : 표층용, WC-6(PG76-22), 1등급 골재

- 구매물량 : 556톤

소요금액 : 73,374천원

※ 계약심사과-20386(2015.12.17.) - 2016년 계약심사 대상 통보

☞ 물품의 제조,구매 : 2천만원이상 계약심사 대상

건설폐기물 운반 및 처리용역 발주

계약방법 : 전자공개수의계약

발주물량 : 폐아스콘 556톤

소요금액 : 17,000천원

※ 건설폐기물처리 분리발주 : 건설폐기물의 제활용촉진에관한 법률 제15조 1항

Ⅳ		추 진 계 획

2016.  3. 25 : 특정제품(공법)선정위원회 개최

2016.  3. 30 : 공사발주 및 공고

2016.  4월   : 계약 및 착공

2016.  4월 ~ 10월 : 공사시행 및 준공

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.