문서번호	설비부-4408
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	03/24 권오식

- 돈화문 국악예술당 건립 전기공사 -

정산 설계변경 요청 사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

도시기반시설본부

[설 비 부]

- 돈화문 국악예술당 건립 전기공사 -

정산 설계변경 요청사항 검토보고

우리 본부에서 시행중인 「돈화문 국악예술당 건립 전기공사」와 관련 감리단으로부터 제출된 정산 설계변경(총차,3차) 요청 사항에 대하여 검토 보고 드림

1. 공사계요

○ 공사규모 : 지하3층/지상1층 연면적 1,773㎡

○ 공사기간 : 총차 -‘13.12.23 ~‘16.03.31.

3 차 -‘15.11.25 ~‘16.03.31.

○ 도 급 액 : 총차 565,026,000원(3차 365,026,000원)

○ 시 공 사 : 삼언전공(주) 대표 공석복

○ 감 리 사 : ㈜영화키스톤건축사사무소 대표 김인구

2. 관련근거

○ 돈화문감 제16-70(16.03.23) : 정산 설계변경 요청서 검토 보고

3. 설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 지하2층 공연장 복도 벽면 인테리어 간접조명(Type F2) 누락 반영

- 보험료 및 안전관리비 정산으로 금량 및 금액 변경.

○ 설계변경 내용(3차)

구 분	당 초	변 경	증감금액	비고
전등설비 공사	지하2층 복도 공연장벽면 간접조명등(Type F2) 설치 누락	누락된 간접조명등(Type F2) 60등 설계 반영	증)6,046천원
보험료 등 간접비	미사용 보험료등 간접비 감액 조정 건강보험료 : 감)2,006,724원 노인장기요양보험료 : 감) 131,441원 국민연금보험료 : 감)2,939,250원 퇴직공제부금 : 감)2,714,978원 산업안전관리비 : 감)2,610,610원 제경비 및 부가가치세: 감)1,320,068원		감) 11,723천원
계			감) 5,677천원

○ 공사금액 변경 내용

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 감 액	비 고
총 차	565,026,000	551,162,000	감 13,864,000
1 차	100,000,000	95,965,000	감 4,035,000	‘15.10.16 준공정산 감액
2 차	100,000,000	95,848,000	감)4,152,000	‘15.12.07 준공정산 감액
3차(금회)	365,026,000	359,349,000	감 5,677,000

※ 공사기간 변경 없음

4. 검토자 의견

○ 본 공사의 감리원이 설계변경 요청한 사항을 검토한 결과 설계변경 요청내용이 적정한 것으로 판단되어 변경계약을 시행하고자 함.

따로붙임  1. 설계변경 요청 공문

2. 설계변경 내역서(총차, 3차) 각 1부.

5. 합의각서 1부. 끝.