투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	표범사 제작 계약 기한 연장 의뢰

1. 동물기획과-1274(2016.3.24.)호와 관련입니다.

2. 표범사 외부 전시장 설명패널 제작 계약기한 연장을 아래와 같이 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 표범사 전시 디자인 및 전시물 제작설치

나. 공사위치 : 표범사 외부 전시장

다. 공사내용 : 표범 설명패널 및 포토존 등 전시 디자인 및 제작

라. 계약금액 : 금94,050,000원

마. 설계변경사항(준공기한 연기)

○ 공사기간

- 변 경 전 : 2016.1.28. ~ 2016.3.27.

- 변 경 후 : 2016.1.28. ~ 2016.4.10.

○ 계약금액 : 변동없음

○ 연기사유 : 전시물 설치 대상인 외부 관람대 도색 미완성

바. 도 급 자 : ㈜도둠디자인 김명희

붙임 : 계약기간 연장보고서 1부.  끝.

	동물기획과장
★주무관	양효진		동물기획과장	03/24 이종혁
협조자	주무관	강경숙
시행	동물기획과-1275	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-500-7995	/		/	대시민공개