함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	2020 물 수요 관리 종합계획 학술용역 준공기한 연기에 따른 조치 의뢰

1. 재무회계과-2690(2015.12.4.)호와 관련입니다

2. 우리 본부와 계약체결되어 추진중인 아래 용역에 대하여 준공 기한을 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 :2020 서울특별시 물 수요 관리 종합계획 학술용역

2) 계 약 자 : (재)서울연구원 김수현

3) 계약금액 : 금273,850,000원

나. 준공기한 연기

1) 준공기한 연기

가) 당초 용역기간 : 2015. 3. 25. ~ 2016. 3. 31.

나) 변경 용역기간 : 2015. 3. 25. ~ 2016. 5. 31.(2개월 연장)

2) 연기사유 귀책소재 : 상수도사업본부

3) 지체상금 부과여부 : 미부과

4) 연기사유 : 환경부 승인 검토 및 검토사항 보완에 따른 처리기간 소요

붙  임 : 1. 준공기한 연기보고 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	계획설계과장
주무관	최영서		계획설계과장	03/24 이임섭
협조자
시행	계획설계과-2604	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1414	/전송	3146-1429	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개