투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	정릉천고가 텐던 교체공사 강선해체 일정 알림

1.‘16.3.22. 정릉천고가 안전대책 자문회의 의견 및 도로시설과-3431(‘16.3.24.)호와 관련입니다.

2. 정릉천고가 텐던 교체공사 작업단계별 일정을 아래와 같이 알려드리오니 관련자가 입회할 수 있도록 조치하여 주시기 바라오며 아울러 수방기간 가벤트 철거를  전제로 작업인원 보강 등 공기단축 방안을 시행중으로 적기에 공사가 완료 될 수 있도록 적극적인 지원을 부탁드립니다.

가. PE관 제거 및 강선 해체 입회요청일(작업시작일)

구 분	#6번 텐던	#1번 텐던	#3번 텐던	#5번 텐던	비고
PE관제거	3.25(금)	4.4(월)	4.19(화)	5.1(일)
강선해체	3.26(토)	4.5(화)	4.20(수)	5.2(월)

※ 현장여건에 따라 일정이 조정될 수 있으므로 연구용역학회와 수시로 일정협의 예정임 (감리단 연락처 : 02) 921-4183)

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로시설과장),서 울 특 별 시 장(교량안전과장),서울특별시시설관리공단이사장
주무관	오열상		토목총괄과장	이동훈		토목부장	03/24 김영수
협조자	주무관	심규진		주무관	이상욱A
시행	토목부-5660	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2542	/전송	3708-2599	/		/	대시민공개