서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	문화체육관광부장관(게임콘텐츠산업과장)
(경유)
제목	e스포츠전용경기장 준공일정 변경에 따른 사업변경 승인요청

1. 문화체육관광부 게임콘텐츠산업과-2127(2014.10.06.)호, 서울시 문화융합경제과-11336(2015.10.16.)호와 관련입니다.

2. e스포츠전용경기장 구축사업의 준공일정 변경(연기)이 불가피해 짐에 따라「e스포츠전용경기장 구축사업 국고보조금 교부결정서」에 의거하여 다음과 같이 사업변경 승인을 요청드립니다.

가. 국고보조사업 개요

- 보조사업 명   : e스포츠전용경기장 구축

- 보조사업 기간 : 2010 ~ 2016. 2.

- 보조사업 내용 : IT-Complex 내 e스포츠전용경기장 구축

(대민동 11~17층, 경기장 총 연면적 7,564㎡)

나. 사업변경 내용 : 준공 일정 변경(2016. 2.29. → 2016. 4.30.)

다. 변경 사유 : e스포츠경기 중계 및 방송 관련 추가 시설 공사를 진행함에 따라 준공 시기 연기. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김병모		상상산업팀장	강인철		문화융합경제과장	03/24 代박원근
협조자
시행	문화융합경제과-3122	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울 3층	/
전화	2133-2596	/전송	2133-1061	/	heness@seoul.go.kr	/	대시민공개