의원 요구 자료 제출

시 행	물재생계획과-4019
결재일자	2016.3.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

전문관		하수관리팀장	물재생계획과장	물순환안전국장		결재
배원영		김재승	하상문	03/25 권기욱
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 339번, 이정훈의원, 환경수자원위원회)

1. 시의원 요구번호 339번(2016.3.22.)호와 관련입니다.

2. 환경수자원위원회 이정훈 의원(더불어민주당)으로부터 요구된 자료를 아래와 같이 같이 제출합니다.

이정훈 의원(환경수자원위원회, 더불어민주당)

【 물순환안전국 】

○ 암사역 주변 침수해소 (60억) 사업현황 및 세부계획

암사역주변 하수암거 신설공사

□ 사업목적

○ 2010~11년 기습적인 집중호우시 침수된 암사동 및 천호동 지역

하수암거 신설로 침수피해 최소화 하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 강동구 천호빗물펌프장~선사사거리 (암사동,천호동)

○ 규    모 : □1.8×1.5m~□5.6×2.5m, L=1,975m

(1공구 - □2.0×2.5m ~ 5.6×2.5m, L=783m)

(2공구 - □1.8×1.5m ~ 3.0×2m×2련, L=1,192m)

○  기    간 : 2015.12 ~ 2018.12

○ 총사업비 : 27,242백만원 (공사비25,342 감리비 1,900)

[’16년 6,000백만원(공사비 5,500, 감리비 500)]

□ 사업현황 및 계획

○ ’15.11 : 건설사업관리용역 착수

○ ’15.12 : 시설공사 1 공구 착수

○ ’16. 2  : 유관기관 지장물 협의 및 이설

○ ’16. 3  : 1 공구 토공 및 가시설 작업중

○ ’16. 5  : 시설공사 2공구 계약 및 착수 예정

○ ’17.12  : 시설공사 1공구 준공

○ ’18.12 : 시설공사 2공구 준공

□ 소요예산                                     (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투 자	2016년	2017년 이후
계	27,242	7,793	6,000	13,449
시 설 비	25,342	7,613	5,500	12,229
감 리 비	1,900	180	500	1,220

□ 효    과

○ 암사역(암사동,천호동) 주변 하수암거 신설로 통수능을 확보하여 우수 배출

능력을 향상 침수를 저감하여 주민에게 안정된 정주 환경을 제공

□ 위치도

1공구 - 시행중

2공구 - 발주 예정

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물재생계획과)	담당사무관	김재승
	☎ 2133- 3790	주무관	배원영
	작 성 일 : 2016. 3. 24.