함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	관급자재(자기질타일) 수량변경 요청

우리사업소에서 시행하고 있는『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』에 소요되는 관급자재(자기질타일)에 대하여 아래와 같이 수량변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재(자기질타일) 수량변경 요청내역

계 약 명 (공사명)	계약번호 (계약업체)	품 명	단위	수 량			변 경 사 유	비 고
				당 초	변 경	증 감
관급자재구매 (대현산배수지(1-3지) 내부 방수ㆍ방식공사)	2016030932200 (기륭종합상사)	자기질타 일	㎡	6,002	5,055	(감) 947	원형기둥 공법변경	계약금액
								당초 178,829,830원 변경 150,613,920원 (감)28,215,910원

나. 납품기한 : 2016.05.06(변경없음)

다. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지체비, 기타교체비(가압장, 배수지 등 시설물 유지관리)

따로붙임 1. 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	김찬오		급수설비팀장	代최성태		급수운영과장	03/25 오기석
협조자	주무관	노은영		주무관	박은경
시행	급수운영과-7054	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-772-7211	/전송	02)3146-2789	/	kco0178@seoul.go.kr	/	대시민공개