투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	돈화문 국악예술당 건립 전기공사 계약변경(2회) 의뢰(총차, 3차)

우리 본부에서 시행 중인 『돈화문 국악예술당 건립 전기공사』와 관련 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명  : 돈화문 국악예술당 건립 전기공사

나. 계약자  : 삼언전공(주)

다. 계약변경 내용

구 분	도급비(원)			비 고
	당 초	변 경	증․감
총차	565,026,000	551,162,000	감) 13,864,000
1차	100,000,000	95,964,000	감) 4,035,000	‘15.10.16 준공정산 감액
2차	100,000,000	95,848,000	감) 4,152,000	‘15.12.07 준공정산 감액
3차	365,026,000	359,349,000	감) 5,677,000	내역 및 보험료 정산

※ 공사기간 변동없음

라. 예산과목 : 문화정책과, 문화도시 서울구현, 문화기반시설조성,
돈화문로 전통문화시설 건립, 시설비 및 부대비(시설비)

붙임	1) 설계변경 요청사항 검토 보고서 1부.

2) 감리단 설계변경 요청 공문 1부.

3) 설계변경 내역서(총차, 3차) 각 1부.

4) 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	03/25 권오식
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-4471	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개