문서번호	도로시설과-3593
결재일자	2016.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전시설팀장	도로시설과장		안전총괄관
배광희	김호성	송상영		03/25 이택근
협 조	주무관		이병일
	주무관		박지영

2016 풍수해대비 지하차도 기전설비 점검계획

2016. 3

안전총괄본부

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	시설관리공단
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016 풍수해대비 지하차도 기전설비 점검계획

2016년도 풍수해대비 지하차도 기전설비에 대한 우기전 사전점검 및 정비를 현장중심으로 실시하여 수방대책에 만전을 기하고자 함.

※ 수방기간 : 2016.5.15~10.15

관련근거

□ 2016년 풍수해대비 안전대책 추진계획(하천관리과, ‘16.1.20)

- 집중호우대비 지하차도 배수펌프 등 점검․정비 실시

□ 서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 제4항

- 지하차도 기전설비의 정상작동여부 등을 분기별 안전점검 실시

현 황

□ 대상시설 : 총 143개소 중 강제 배수시설 69개소

단위 : 개소

계	지하차도	터 널	언더패스
69 (143)	60 (102)	1 (33)	8 (8)

※ 괄호안은 전체 지하차도, 터널 및 언더패스 개소수임.

□ 대상설비 : 총 18,130대

단위 : 대

계	배수펌프	CCTV	원격감시 설비	비상 발전기	변압기	배전반	차도등
18,130	239	373	69	55	22	304	17,068

※ 붙임 1 풍수해대비 점검대상 시설내역 참조

점검방향

□ 수방기간전 점검리스트에 의한 사업소․공단 자체점검 실시

□ 2016 노후 배수펌프 교체사업의 수방기간전 완료 추진

□ 내용연수가 경과된 배수펌프가 설치된 지하차도는 시와 사업소․공단 합동으로 중점점검 실시

세부 점검계획

< 자체점검 >

□ 일 시 : 2016.3.30~4.20(3주간)

□ 주 관 : 각 사업소 및 시설관리공단

□ 내 용

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

- 원격 감시제어를 위한 자동제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

- 배전반 등 전기설비에 대한 절연, 접지, 보호기 동작 등 이상여부

- 비상발전기의 연료충전 상태, 냉각수․윤활유 누유 여부

- 기타 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태 등

※ 붙임 2 지하차도 기전설비별 점검리스트 참조

□ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장 시정조치, 공사수반 시 유지관리 계약업체 활용 보수

- 시설물 개선이 필요한 경우 우선 안전조치 후 별도계획 수립 추진

	< 2016 노후 배수펌프 교체사업 수방기간전 완료 >
□ 대 상 : 지하차도 9개소(배수펌프 21대) - 증산․모래내․성산․창동․월계2․신대․구로역․고척2․오목지하차도 ※ 영등포․대방․사평․동작․염곡지하차도는 감시제어설비 교체 □ 사업비 : 992백만원

< 합동점검 >

□ 목 적 : 노후 배수시설, 자체점검결과 지적사항이 있는 지하차도는 시와 사업소․공단 합동으로 중점점검 실시

□ 일 시 : 2016.4.21~5.11(3주간)

□ 점검자 : 시 도로시설과 및 사업소․공단 팀장, 담당자 등

□ 내 용

- 2016 지하차도 노후 배수펌프 교체사업 추진상태 : 9개소, 21대

- 내용연수가 경과된 배수펌프 정상가동 여부 : 9개소, 27대

※ 석촌․가락․퇴계로․오목․수락․노들길․경인1․광나루지하차도, 이화철교언더패스

- 사업소 및 공단 자체점검시 지적사항 조치여부

- 도로침수 등 상황발생시 신속한 상황보고 체계 구축 여부

※ 붙임 3 지하차도 합동점검 대상시설(내용연수 경과 + 교체사업 시설) 참조

행정사항

□ 자체점검 계획수립 및 점검결과 보고(사업소․공단 → 도로시설과) : ‘16.4.22까지

□ 합동점검시 지적사항 조치결과 보고(사업소․공단 → 도로시설과) : ‘16.5.13까지

붙임  1. 풍수해대비 점검대상 시설내역 1부.

2. 지하차도 합동점검 대상시설 1부.

3. 지하차도 기전설비별 점검리스트 1부.

4. 점검결과 지적사항 및 조치결과(양식) 1부.  끝.