문서번호	토목부-5782
결재일자	2016.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
정문수		여용석	전결 03/25 김영수
협조

설계용역 준공기한 연기 보고

( 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 실시설계)

2016. 3.

서울특별시도시기반시설본부

( 토  목  부 )

설계용역 준공기한 연기 보고

( 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 실시설계)

현재 용역 수행 중인 『중랑천 초안산앞 보행교량 설치 실시설계』에 대하여 전기설계 및 성과품 검토를 위한 준공기한 연기 보고임.

※ 준공기한(전체) : 당초)2016. 3.29. → 변경)2016. 4.29. (증 1개월)

(1차) : 당초)2016. 3.29. → 변경)2016. 4.29. (증 1개월)

▢ 근    거 : 경동 제2016-387호(2016. 3.25.)로 과업기간 연장 요청

▢ 용역개요

◦ 용 역 명 : 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 실시설계

◦ 위    치 : 노원구 하계동 학여울청구아파트~월계동 월계역(중랑천)

◦ 용역내용 : 보행교량 설치 폭4.5m, 연장191m

월계역 입구 교차로 주변도로 구조개선 (경원선 철도교 하부)

◦ 용역기간 :′15. 9.15.~′16. 3.29. (1차 : ′15. 9.15.~′16. 3.29.)

◦ 용 역 비 : 금277,869,000원 (1차 : 277,869,000원)

◦ 용 역 사 : ㈜경동엔지니어링, ㈜동해종합기술공사, ㈜경진엔지니어링

▢ 추진현황 (공정률 : 98%)

◦ '07.11.26. ~  '08.11.20. : 기본 및 실시설계

◦ '15.05.14. : 시장 우원식 국회의원 면담

- 보행교 설치 조속 추진 및 보행안전 확보 위해 마들로 횡단 추가 연장 요청

◦ '15.05.20. : 보행교량 설치 추진 방침 (하천관리과)

- 보행교량 마들로 추가 횡단에 따른 재설계

◦ '15.09.15. : 설계용역 계약 및 착수

◦ '15.09.22. : 주민설명회 개최

◦ '15.12.16. : 설계자문회의

◦ '16.03.04. : 건설기술자문소위원회

▢ 보고내용

가. 용역비 및 용역기간 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 / 감	비 고
용 역 비	전체	277,869,000	277,869,000	-	변경없음
	1차	277,869,000	277,869,000	-	변경없음
용역기간	전체	'15. 9.15.~'16. 3.29.	'15. 9.15.~'16. 4.29.	증)1개월
	1차	'15. 9.15.~'16. 3.29.	'15. 9.15.~'16. 4.29.	증)1개월

나. 준공기한 연기 사유

◦ 설계 및 성과품 검토를 위한 준공기한 연기

-  전기(경관 조명 포함) 설계 수행

- 설계 성과품 검토

◦ 용역 준공을 위한 행정절차 이행

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치의견

◦ 상기와 같이 전기설계 및 양질의 성과품 작성을 위하여 설계용역 준공기한을 연기하여 용역 업무 수행에 만전을 기하고자 함.

▢ 향후계획

◦ '16. 4. : 실시설계 준공

붙임 : 1. 준공기한 연기 공문 1부.

2. 예정공정표(변경) 1부.  끝.