투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약의뢰(한강변 노후차집관로 정비공사)

1. 시설보수과-1102(2016.03.25.)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 시행중인 『한강변(강북) 노후차집관로 정비공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 한강변(강북) 노후차집관로 정비공사

나. 사업기간 : ‘15.11.16 ~ ’16.03.31

다. 공 사 비 : 744,318천원

라. 도 급 자 : ㈜대근토건 대표 김병호

마. 공사개요 : 비굴착보수 : D=1,200mm, L=780m, 신축이음보수 202m

바. 설계변경 현황

- 금액변경

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비		744,318,000	878,856,000	증 134,538,000
도급비	공급가액	676,652,727	798,960,000	증 122,307,273
	부 가 세	67,665,273	79,896,000	증 12,230,727
	계	744,318,000	878,856,000	증 134,538,000

- 설계변경 사유

• 비굴착보수공 시공수량 증가(D=1,200mm, L=780m→1,003.5m)

• 기타 시공 물량 증감 및 제경비 정산

사. 예산과목 : 변경없음

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.    끝.

	시설보수과장
주무관	최승룡		시설보수과장	03/25 강병수
협조자
시행	시설보수과-1113	(		)	접수		(		)
우	04809	성동구 자동차3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	csy21@seoul.go.kr	/	대시민공개