문서번호	설비부-4568
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
지장환		여인웅	03/28 권오식
협 조

『서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기, 소방감리용역』

용역기간(2차분) 연기검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기, 소방 감리용역」

용역기간(2차분) 연기 검토 보고

선행 공정인 건축공정 마감지연으로 감리(전기, 소방) 용역기간(2차분)을 다음과 같이 연기하고자 검토 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기·소방감리용역

용역기간 : ‘15.11.01. ~ ‘16.03.31.(2차 ‘16.02.22.~‘16.03.31.)

계약금액 : 18,000,000원(2차 11,800,000원)

계 약 자 : ㈜성우이엠이 대표 조정환

Ⅱ		용역기간(2차분)연기 검토 내용

관련근거

○ 운영부서 합동점검결과 보고 : 설비부-4485(2016.03.25.)

용역기간 연기사유

○ 본 소방(기계·전기)공사의 선행 공정인 건축공사의 지연으로 당초 용역기한내 소방시설 시운전 및 완공검사가 불가능하여, 용역기한을 기계공사기간에 맞춰 연기하고자 함.

용역기간 연기내용

구분	당 초	변 경	비 고
전 체	2015.11.01.∼2016.03.31.	2015.11.01.∼2016.04.15.	계약금액 변경없음
1 차	2015.11.01.∼2016.02.29	2015.11.01.∼2016.02.29.	준 공
2 차	2016.02.22.∼2016.03.31.	2016.02.22.∼2016.04.15.	계약금액 변경없음

귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금부과여부 : 미부과

Ⅲ		보고자 조치의견

본 감리용역의 당초 2차분 완수기한을 2016.04.15일까지 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 합의서 1부. 끝.