문서번호	설비부-4564
결재일자	2016.3.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
지장환		여인웅	03/28 권오식
협 조

『서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기공사 』

설계변경(정산)검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기공사」

설계변경(정산) 검토 보고

『서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기공사』와 관련하여  운영부서 요구사항에 대하여 설계변경(정산)을 시행하고자 아래와 같이 검토 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기공사

공사위치 : 은평구 통일로 684(서울혁신파크 8동)

공사규모 : 서울혁신파크8동(1,2,4층) 리모델링(전기)

공사기간 : 2015.11.01. ~ 2016.03.31.(2차 2016.02.05.~2016.03.31.)

계약금액 : 341,258,000원(2차 319,258,000원)

시 공 사 : 금송전기(주) 대표 신중현

Ⅱ		설계변경 사유 및 내용

설계변경 근거

○ 서북(은평)50+캠퍼스 리모델링 변경사항 요청(1차)

- 인생이모작지원과-1247(2016.02.03.)

○ 서북(은평)50+캠퍼스 리모델링 사업 변경 요청(전력계량기)

- 인생이모작지원과-2340(2016.03.09.)

○ 서북(은평)50+캠퍼스 리모델링 변경사항 요청(2차∼4차)

- 인생이모작지원과-2728(2016.03.21.)

○ 운영부서 합동점검(2016.03.24.)결과 보고

- 설비부-4485(2016.03.25.)

설계변경 주요내용

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
1층 북카페, 엘리베이터홀 조명 추가 및 2층 사무실 유리벽 위치 변경으로 등기구 재 설치	-	6,854	증 6,854
1층 교육실 인덕션 전원용 콘센트 설치 추가	-	6,549	증 6,549
4층 예체능실 전기온돌 설치 추가	-	4,008	증 4,008
전력량계 설치 및 원격검침시스템 추가	-	14,572	증 14,572
가스누설경보기 설치 삭제	90	-	감 90
직접공사비 합계	90	31,983	증 31,893
제경비 정산	89,747	82,496	감 7,251

공사금액 변경내용

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감금액	비고
총차	341,258,000	365,387,000	증 24,129,000
1차	22,000,000	21,487,000	감 513,000	‘16.02.25 준공(보험료 정산)
2차	319,258,000	343,900,000	증 24,642,000

Ⅲ		보고자 조치의견

본 공사의 감리원 검토결과 설계변경(정산) 요청내용이 적정한 것으로 판단되어 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 실정보고도서 및 합의서 1부. 끝.