문서번호	방재시설부-4253
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	치수시설과장	방재시설부장	시설국장		도시기반시설본부장
이병환	김흥근	임춘근	형태경		03/28 고인석
협 조
	주무관			박찬표

「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사(T/K)」

추가수리모형실험 출장점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

도

2016. 3

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사」

추가수리모형실험 출장점검 결과 보고

추가수리모형실험을 수행하는 인제대(경남김해)에 시민감사관 합동실험진행 전반사항에 대하여 출장 점검하고 결과를 보고 드림.

1		추가수리모형실험 개요

❍ 기    간 : 2015. 4. ~ 2016. 10(18개월)

❍ 수행기관 : 대한하천학회(책임연구원 : 인제대 박재현 교수)

❍ 실험목적

- 강우 사상별 터널내 잔류수를 고려한 최적의 유지관리 운영계획 수립

2		출장점검 실시

❍ 일  시 : 2016.03.23(수)

❍ 장  소 : 인제대 추가수리모형실험장(경남 김해)

❍ 출장자 : 4명

- 도시기반시설본부 : 본부장, 방재시설부장, 업무담당(이병환)

- 시민감사관 : 가톨릭관동대 박창근 교수

❍ 출장목적 : 추가수리모형실험 진행 전반사항 점검

3		점검결과

❍ 시 민 감 사 관

- 다양한 실험 Case를 종합하여 실제 운영자가 손쉬운 운영이 가능토록           운영방안 마련 필요

- 터널내 저류량이 있는 경우 복잡한 수리현상으로 운영시 혼란이 있을 수         있으므로 이에 대한 정밀한 검토 필요

❍ 도시기반시설본부

- 잔류수 배제펌프 적정용량 검토 필요(잔류수 배출기간 단축 등)

- 터널내 잔류수량과 기상청 예보를 반영한 운영계획 수립과 돌발강우에  대비한 운영방안도 필요

- 유지관리시 적정한 운영 및 응급상황시 대처등을 고려한 전문인력(토목) 확보 필요

- 동영상(사진) 촬영시 모형 내부 물 흐름이 잘보이도록 외부 청결유지

- 저류량이 50% 내외에서는 불안정(부정적 평가)하지만, 만관시에는 배수기능으로 인해 안정적 방류로 일본의 단순 저류방식에 비해 효율성이   좋음(긍정적 평가)

- 향후 유지관리운영자의 수리모형실험 출장 점검 필요(운영·대응 도움)

【공사 추진 지하수 유출 관련】

- 지하철(2, 5호선) 통과구간에 피해가 발생하지 않도록 지질상태 등 특별관리

- 유출지하수(특히 흙탕물 구간) 내 토사량 관리를 철저히 하여 침하방지

- 지하수유출에 대한 책임감리원의 특별관리 필요

4		조치계획

❍ 점검결과 지적(보완) 및 논의된 사항을 실험에 반영 조치

5		향후 일정

❍ `16.04.~ 05. : 강우사상 Case별 실험 추진

- 5월초 유지관리기관(양천구, 강서구)과 수리모형실험 합동 점검

❍ `16.06 : 실험결과 데이터 분석

❍ `16.07.~ 10. : 운영계획 보고서 작성(종료)

붙임 : 점검사진 1부.  끝.

점 검 사 진

수리모형실헝 점검(유도터널 구간)	수리모형실험 점검(저류터널 구간)

유입수직구(축적 1/15) 유입성능 점검	유지관리 운영계획 보고 및 논의