함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(최종)[2015년 전기설비 유지보수공사(연간단가)]

『2015년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』건에 대하여 아래와 같이 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

나. 계 약 자 : 대원일렉콘(주) 대표 박윤섭

다. 계약기간 : 2015. 5. 19 ~ 2016. 3. 31

라. 변경사유 : 계약물량 증·감 및 신규공정 발생, 제경비 등 정산

마. 계약 변경금액

구 분	당초 금액(원)	변경 금액(원)	증 · 감
공급가액	103,085,255원	98,845,455원	감 4,239,800
부가가치세	10,308,525원	9,884,545원	감 423,980
총 공사비	113,393,780원	108,730,000원	감 4,663,780

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장·배수지 등  시설물 유지관리,

수선유지교체비. 기타교체비

붙임 : 1. 계약변경 내역서 1부.

2. 계약변경 합의서 1부.

3. 계약변경 시행(내부결재) 1부.

4. 계약변경 보고서 1부.

5. 설계변경심의 의결서 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	박태욱		기전팀장	오준식		시설관리과장	03/28 우종근
협조자
시행	시설관리과-7890	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 1동 6층	/
전화	02-2133-2497	/전송	02-2133-1054	/	ptu1960@seoul.go.kr	/	대시민공개