투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	용역 완수기한(2차분) 연기의뢰 요청[서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기, 소방 감리용역]

우리부에서 시행중인 「서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기, 소방 감리용역」에 대하여 2차분 완수기한 연기의뢰 요청을 하오니 조치하여 주시길 바랍니다.

1. 용역개요

- 용 역 명 : 서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 전기, 소방 감리용역

- 용역기간 : 전체 ′15.11.01. ~ ′16.03.31.(2차분 ′16.02.22. ~ ′16.03.31.)

- 계약금액 : 전체 금18,000,000원(2차분 금11,800,000원)

- 계 약 자 : ㈜성우이엠이 대표 조정환

2. 용역 완수기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
전체	2015.11.01. ~ 2016.03.31	2015.11.01 ~ 2016.04.15	(증15일) 계약금액 변경없음
2차	2016.02.22. ~ 2016.03.31	2016.02.22 ~ 2016.04.15

3. 준공기한 연기사유

- 본 공사의 선행공정인 건축공사 지연으로 기계공사기간에 맞추어 감리(전기, 소방) 용역 기간(2차분) 연기.

4. 귀책소재 : 발주처

5. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 용역기간 연기검토 보고서 1부.

2. 합의서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	지장환		환경설비과장	여인웅		설비부장	03/28 권오식
협조자
시행	설비부-4595	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	amanhope@seoul.go.kr	/	대시민공개