시  민

문서번호	급수운영과-7514
보존기간	년
결재일자	2016.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
여수현	유명은	조면행	03/28 이인걸
협 조

16년 송배수관 정비공사 발주계획

(등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사)

2016.3

강서수도사업소

「등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사」

‘16년 송배수관 정비공사 발주계획

양천구 관내 노후 송배수관을 정비하여 적수발생 및 누수를 사전에 예방 함으로서, 시민에게 깨끗하고 맑은물을 공급하고 사업소 유수율 향상에 기여코자 함.

Ⅰ		공사 개요

□ 공사명 : 2016년 등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사

□ 공사개요

- 배급수관 부설 D=200~700mm, L=1,348m

- 각종 밸브설치 D=150~700mm, N=20개소

□ 공사기간 : 착공일로부터 228일간

□ 소요예산 : 2,351,925천원

구 분	금 액 (원)	비 고
총 공사비	2,351,925,000
도 급 비	977,125,000
관급자재비	574,800,000
복구비 및 기타이설비	800,000,000

Ⅱ		공사 계획

□ 공사구간 선정

- ‘연차별 송배수관정비사업 추진계획(배수과-1886(‘15.3.24))

- 정비구간 선정 : ① 민원발생(녹물출수 등) 및 누수다발 구간

② 배수관 경과년도가 오래된 구간

□ 2016년 송배수관정비사업 계획 심사결과 통보 : 배수과-1403(‘16.2.18)

□ 구간별 위치도 및 공사개요

구간	위 치	공사개요		현황사진	비고
		구경 (mm)	총연장 (m)
1구간	등촌역삼거리 ~ 양화교간	200 ~ 700	1,348

□ 추진경과(설계내역 작성 및 설계심사)

설계서 작성(2016.1 ~ 2월)			․ 구간별 현장조사 및 설계내역 작성 - 도로굴착 가능여부 조사 - 설계시 송배수관정비 설계지침 반영
	□
			․ 심사의뢰 : 본부 재무회계과 - 관련대호 : 급수운영과-7223(2016.3.24)호 - 심사요청 금액(도급액) : 1,020,530천원
공사 설계심사 의뢰(본부 재무회계과)
	□
			․ 관련대호 : 재무회계과-4464(2016.3.25)호 ․ 심사결과 금액 : 977,125천원(절감률 4.25%) - 송배수관 부설 D=200~700mm, L=1,348m - 각종 밸브설치 D=150~700mm, N=20개소
심사결과 통보

Ⅲ		향후 추진계획

□ 공사 계약의뢰 : 2016. 3. 29(화)

□ 공고,개찰 및 적격심사 : 2016. 3. 30 ~ 4. 12(긴급공고)

□ 낙찰자 결정 및 계약 : 2016. 04. 12 ~ 04. 18

□ 공사 착공(예정) : 2016. 04. 20(계약일로부터 3일이내)

□ 공사 준공 : 2016. 12월초(공사기간 : 착공일로부터 228일 간)

Ⅳ		기타 행정사항

□ 서민경제 활정화를 위한 우리 상수도사업본부 “2016년 재정 조기집행 추진계획(기획예산과-1830,’16.2.25)”에 의거 긴급입찰 시행하여 입찰기간 및 계약기간을 단축하고,

□ 체계적인 집행계획에 의한 실적관리로 경제활력 제고 및 서민생활 안정화 지원에 기여코자 함.

따로붙임 : 1) 관련공문(계약심사 결과) 1부.

2) 공사설명서 1부.

3) 설계내역서(유대, 무대) 1부.

4) 청렴계약 이행서약서 1부.

5) 긴급공고 사유서 1부. 끝.