문서번호	방재시설부-4265
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김재무		신용우	03/28 임춘근
협조	문화시설과장		안연수
	주무관		박영동

돈화문 국악예술당 건립공사

조경사항 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

잠원2 빗물펌프장 신설공사

조경사항 실정보고 검토

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『돈화문 국악예술당 건립공사』와 관련 현장여건 변화에 따른 식재 및 시설물 등 조경변경사항에 대한 감리단 실정보고사항 검토 보고임

- 관련근거 : 돈화문감 제16-77호(2016.03.28.)

□ 공사개요

○ 위    치 : 종로구 와룡동 12-2번지 일대

○ 규    모 : 지하2층 / 지상 1층, 국악예술당

- 조경공사 내용(전체공정율 25%)

· 식 재 공 : 교목-소나무 등 5종 28주, 관목- 매자 등 5종 710주,

초화류- 맥문동 등 7종 1,410본, 잔디 340㎡

· 시설물공 : 등의자 등 5종

· 포 장 공 : 해미석깔기 등 7종

○ 사업기간 : 2013. 12. 27 ~ 2016. 03. 31

○ 도 급 비 : 195억원(조경 115백만원)

○ 시공/감리 : 정오종합건설㈜ / (주)영화키스톤건축사사무소

□ 실정보고사항(조경)

○ 검토 경위

- “율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사”의 도로선형변경에 따른

건축 후퇴선 변경으로 조경물량 변경

- 굴뚝, 변압기 등 부대시설 설치에 따른 법면발생 및 구조물 차폐,

식재면적 감소 등 현장여건변화

- 썬큰 내 기 시공 구조물변경에 따른 조경물량 변동 등

○ 검토 내용

- 주요변경 사항

구 분	실정보고내용	검토의견
교 목	소나무 등 5종 28주 → 소나무 등 4종 12주	현장여건을 반영한 변경안 으로 적합
관 목	매자나무 등 5종 710주 → 매자나무 등 7종 2,130주
초화류	맥문동 등 7종 1,410본 → 맥문동 등 5종 2,640본
지피류	잔디 340㎡ → 잔디 162.09㎡
시설물	화강석디딤돌포장 등 5종 → 화강석디딤돌포장 등 4종
포장공	잔디보호매트 등 7종 → 잔디보호매트 등 5종

- 물량변경 내역 : 붙임

□ 공사비 변경내역(조경)

(단위:천원)

구 분	금 액		증 감
	당 초	변 경
직접공사비	71,974	61,312	-10,662
제경비	32,717	31,224	-1,493
공급가액	104,691	92,536	-12,155
부가가치세	10,469	9,254	-1,215
도급공사비	115,160	101,790	-13,370

□ 검토결과

『돈화문 국악예술당 건립공사』의 현장여건 변동에 따른 식재수량

및 시설물 변경사항으로 감리단 실정보고사항을 승인하며 향후 설계

변경 반영 및 준공정산토록 책임감리원에게 통보하고자 함.

붙임 : 1) 물량변경내역 1부.

2) 실정보고 검토의견서 1부.  끝.