투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청

1. 우리부에서 시행중인 「한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내용

1) 용 역 명 : 한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계용역

2) 계약금액 : 996,600,000원

3) 계약업체 : 극동엔지니어링㈜ 외 3개사

4) 용역기간

- 당초 : 2014.12.29. ~ 2016.3.31.

- 변경 : 2014.12.29. ~ 2016.5.31.

붙임 : 1. 준공기한 연기보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	윤창렬		토목설계과장	여용석		토목부장	03/28 김영수
협조자
시행	토목부-5935	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2586	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개