문서번호	소방행정과-4156
결재일자	2016.3.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
이호경	황인대	윤은생	03/28 이귀홍

대림119안전센터 구내식당 환경개선 및 주유기 교체 계획

2016. 03. 28

영등포소방서(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

출동대원 구내식당 환경개선 및 본서 주유기 교체공사 위한

대림119안전센터 노후된 구내식당 싱크대 등을 교체하여 출동대원 근무환경을 개선하고, 본서 자가주유소 내구년한 경과한 주유기를 적기에 교체하여 출동태세 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 추진 근거

소방행정과-96(2016.01.04.)호 『2016년도 소방안전특별회계 예산편성 결과 알림』

Ⅱ. 예산 현황

확보예산 : 금20,500천원

예산과목 :직무환경개선/소방관서보수,보강공사/시설비(401-01)

Ⅲ. 사업 현황

연번	사 업 명	확보예산 (천원)	면적(㎡)	준공년월	계약방법
1	대림119안전센터 구내식당 환경 개선	11,500	48	2000.11	전자수의시담 (수의계약)
2	본서 주유기 2기 교체	9,000	127	2003.03	〃
	계	20,500

Ⅳ. 세부추진 일정

대림119안전센터 구내 식당 환경 개선 공사

○ 주요 환경개선 공사내용

- 기존 싱크대 및 배식대 일체 제작 교체

- 천정 및 벽 도장( 일면 일러스트 필름처리)

- 식탁 의자 보수

- 주방 출입문 1개소 신규 설치.

- 급·배수 및 가스 배관 이설 등

- 기타 : 개수대 급· 배수관 이설 등

○ 세부 추진계획

일 정	세 부 일 정	비 고
3. 30 ~ 4.5	발주계획수립, 산출기초조사(시장가격조사)
4. 6 ~ 4.8	입찰공고 및 계약체결
4. 10 ~ 4.25	착공, 준공, 검사(수), 대금지급

본서 자가 주유소 주유기(2기) 교체

○ 교체 수량 : 2기 (복식 1, 단식 1)

○ 세부 추진계획

일 정	세부일정	비 고
3. 29 ~ 4. 1	발주계획수립, 산출기초조사(시장가격조사)
4. 4 ~ 4. 7	입찰공고 및 계약체결, 착공
4. 10 ~ 4. 15	준공, 검사(수), 대금지급

붙임  1. 대림119안전센터 구내식당 현 실태 사진 1부.

2. 본서 자가주유소 사진 1부.

2. 대림119안전센터 구내식당 환경개선 계획 평면도 1부. 끝.