문서번호	토목부-5888
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
윤창렬		여용석	03/28 김영수
협조

준 공 기 한  연 기 보 고

[한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계 용역]

2016. 3.

도시기반시설본부

(토목부)

준 공 기 한   연 기 보 고

[한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계 용역]

용역개요

○ 용역명 : 한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계 용역

○ 위  치 : 한남대교 북단

○ 규  모 : 교량 2개소

· RampA (L=839m), RampB (L=555m)

○ 기  간 : 2014.12.29. ~ 2016.3.31.

○ 용역비 : 996,600,000원

○ 용역사 : 극동엔지니어링㈜   대표  이철준

용역기한 연기

구 분	당 초	변 경
용역기간	2014.12.29.~2016.3.31.	2014.12.29.~2016.5.31.
도 급 비	996,600,000원	변경없음

연기에 따른 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금 : 미부과

연기사유

○ 추가로 이행해야 할 특정공법선정심사위원회 수행 및 결과 반영 등 행정절차 이행으로 지연되어 준공기한 연기가 불가피함.

조치의견

○ 위 사유로 인하여 한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계 용역을 연기조치하여 업무추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 공문서 사본(예정공정표,합의각서 포함) 1부.   끝.